	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	목 차	PAGE: 1 OF 1

◈   목     차   ◈

0.  목       차

1.  개 정 이 력

2-1. 공 사 개 요

2-2. 적 용 범 위

2-3. 주 요 공 사 량

3.  공 법 개 요

4.  시 공 사 양

5-1. 시공관리 책임사항

5-2. 현장 운영방침

6.  예 정 공 정 표

7.  인 원 투 입 계 획

8.  장 비 투 입 계 획

9.  현 장 조 직 도

10.  시 공 순 서

11.  작 업 FLOW

12.  장 비 배 치 도

13.  품 질 관 리 계 획

14.  안 전 관 리 계 획

15.  환 경 관 리 계 획

16.  검측사항(CHECK LIST)

*별첨

1. 문제점 및 대책안(A-LINE, D-LINE)

2. 장비 CATALOG(제원표 포함)

<SM400, 5T302 PUMP, C-8, P-550 PUMP>

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	개 정 이 력	PAGE: 1 OF 1

1. 개 정 이 력

No.	문 서 제 목	개정항목	개정번호/개정일자	개 정 내 용	비 고
0	전 항목	전 page	0 / 2000.05.09	신규제정

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	공사개요 및 적용범위,공사량	PAGE: 1 OF 1

2-1. 공사개요

2.1  공 사 명 :

2.2  공사기간 : ----13.예정공정표 참조

2.3  공사위치 :

2.4. 공사목적 :하수종말처리장의 차집관로공사에 해당하는 모든공사를 원활히

수행 하는데 목적이 있다.

2-2. 적용범위

0000 건설공사의 차집관로 연약지반개량공사에 관련된 모든 업무에 적용한다.

2-3. 공사량 :

RJP  : 공  수  1,693공

공삭공  9,790.7m

분사공  5,054.2m

M-RJP : 공  수  1,418공

공삭공  2,600.7m

분사공  8,737.7m

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	공 법 개 요	PAGE: 1 OF 3

3. 공법개요

R.J.P공법은 초고압 분류체가 갖고 있는 운동에너지를 이용하여 지반의 조직 구성        을 파쇄하여, 파괴된 토립자와 경화재를 혼합 교반하여 대구경의 원주상고결체를

조성하는 공법이다.

즉, 이 공법의 구체적인 Mechanism은 다음의 R.J.P 공법 개략 모식도에서 보는 바       와 같이 상단부에서 일차적으로 초고압수와 AIR-JET류를 분사하여 지층을 절삭하여       일정 공간을 느슨하게 한 다음 하단부에서도 2차적으로 초고압 경화재(Cement            Paste)와 Air-Jet류를 분사하여 절삭 범위를 더욱 확대시키는 System 이다.

M-RJP조성(RJP하단)

< R.J.P공법 개략 모식도 > MRJP공법도 동일

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
JD - JG - 03	공 법 개 요	PAGE: 2 OF 3

유체의 운동에너지에 의한 파괴 MECHANISM은 대체로 다음과 같다.

			동수압(動水壓)
			분류체의 맥동부하
• 초고압 분류체 (超高壓 噴流體)			물 Wedge 효과
			수괴(水塊)에 의한 충격력
			Cavitation 현상

이러한 작용은 상기에 표현한 것들과 단독 또는 상호 관계가 있다.

기본적으로는 고압 분류체가 토괴(土塊)에 충돌하면 지반의 조직이 순간적        으로 파괴됨과 동시에 토립자 표면을 따라 흐르는 분류체 주위에 발생하는        부압(負壓)에 의해 토립자를 끌어넣고 더욱이 분류체의 반동 작용과 후속         분류체가 충돌하여, 전단력(剪斷力)으로 발생하는 이때의 파괴력은 다음 식       에 의해 이론적으로 설명될 수 있다.

[eqn: rmboldF ~bold=~ boldρ ~·~ boldQ ~·~ boldVm]

[eqn: rm~~·~~F ~~:~~ 파괴력 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(Kgf)]

[eqn: rm~~·~~ρ ~~:~~ 밀도 ~( ρ = r over g ) ~~~~~~~~~~~(Kgf·sec²/rmm⁴)]

[eqn: rm~~·~~Q ~~:~~ 유 량 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(m³/sec)]

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	공 법 개 요	PAGE: 3 OF 3

[eqn: rm~~·~Vm~~:~~ 분류의 ~평균속도~~~~~~~~~~~(m / sec)]

상기 식으로 알 수 있듯이 밀도(ρ)와 유량(Q), 유속(Vm)과의 값으로 파괴력이 결        정된다.

또한, 유량(Q)은 노즐의 단면적(A)과 유속(Vm)의 값으로 나타낸다.

Q  :  V m  ·  A

F  :  ρ · A(Vm)²이 된다.

즉, 밀도(ρ)와 단면적(A)이 일정하면 파괴력은 유속(Vm)의 제곱에 비례한다. 따라서, 큰 파괴력을 갖기 위한 가장 효과적인 방법은 유속을 크게 하면 되고, 유속을 크게 하려면 분류 분사 압력을 높게 하면 된다.

또한 지반을 절삭하는 경우 대부분이 지하수면 이하를 대상층으로 하고 있으므로        수중Jet와 비슷한 분류 구조로 되고 절삭 거리는 대단히 작아진다. 여기서, 분류체       주위에  공기 분류체를 함께 하면 압력의 감소는 상당히 개선되며, 실험에서는 공        기 분류체가 Zero(0)인 경우의 비거리(飛距離)에 있어서 Air. Jet가 1.0, 1.5 N㎥/       分으로 증가함에 따라 그 값을 각각 2배, 2.5배로 비례적인 효과를 나타낸다. 이것       을 초고압수와 초고압 경화재의 분류체에 각각 Air. Jet를 함께하면 합성적인 비거       리가 3.5배정도로 될 수 있다.

다음에 고압 분류체의 절삭 거리를 늘리기 위하여 사용된 공기는 기포의 파열력(破      裂力)으로 Cavitation 현상을 감소시킴 으로써 그 역활을 완료한 후, 자유면을 찾        아 지표면으로 배출된다. 이때 리프트 작용으로 절삭한 토립자등이 배출되는데, 이       작용을 더욱 촉진시켜서 점성 및 내압의 상승을 극력 저지하는 역활을 한다.

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	시 공 사 양	PAGE: 1 OF 2

4. 시공사양

4.1  R.J.P

구 분		단 위	토 출 량	비 고
초고압수	압 력	Kgf/㎠	400	시멘트 설계량 :2,964Kg/m
	토 출 량	ℓ/분	100
압축공기	압 력	Kgf/㎠	10.5
	토 출 량	㎥/분	23.36
고 화 재	압 력	Kgf/㎠	400
	토 출 량	ℓ/분	130
인 발 속 도		분/M	30

4.2  M-R.J.P

구 분		단 위	토 출 량	비 고
초고압수	압 력	Kgf/㎠	400	시멘트 설계량 :889Kg/m
	토 출 량	ℓ/분	100
압축공기	압 력	Kgf/㎠	10.5
	토 출 량	㎥/분	23.36
고 화 재	압 력	Kgf/㎠	400
	토 출 량	ℓ/분	130
인 발 속 도		분/M	9

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	시 공 사 양	PAGE: 2 OF 2

4.3  배합비

1㎥당

시 멘 트	760 Kg
물	760 Kg
합 계	1,000 ℓ (1,520kg)

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	시공관리 책임사항 / 현장 운영방침	PAGE: 1 OF 1

5-1. 시공관리 책임사항

5.1.1. 현장소장

5.1.1.1 공사전반 업무를 지휘 및 통솔하며, 예정된 공사 추진을 위한 업무수행.

5.1.1.2 현장 안전, 보건 관리를 총괄 지휘한다.

5.1.2. 공사,공무대리

5.1.2.1 현장 시공업무를 수행하고, 시공계획서 작성 및 공사 공정계획수립 및 관리

5.1.2.2 현장출역 인원 점검

5.1.2.3 현장품질 시스템에 대한 실제적이고 전반적인 관리

5.1.2.4 작업중 요구되는 공정 검사 및 자재 인수검사 보고서 작성

5.1.2.5 현장 도면 수발 관리

5.1.2.6 안전 관리 계획 및 시설물 설치 계획 보고서 작성 및 안전품질 계획서 작성

5.1.3 작업반장

5.1.3.1 현장의 시공업무

5.1.3.2 부적합 사항 시정 업무

5.1.3.3 현장 자재 검수 보조

5.1.3.4 안전 시설물의 유지 관리

5.1.3.5 현장 출역 인원의 배치관리

5-2. 현장 운영방침

5.2.1 당 현장은 품질 및 안전관련 제규정 및 요건을 철저히 준수함으로서 하자 발

생과 안전사고를 사전에 제거하기 위한 예방차원의 품질, 안전관리 활동에

전력한다.

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	예 정 공 정 표	PAGE: 1 OF 1

6. 예정공정표 (첨부)

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	인 원 투 입 계 획	PAGE: 1 OF 1

7. 인원투입계획

(2 Plant 기준)

구 분	인 원	비 고
소 장	1
공사대리(공무)	1
반 장	1
천 공	2
PLANT	2	PUMP 포함
물 차	1
B / H 02	1
계	9

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	장 비 투 입 계 획	PAGE: 1 OF 1

8. 장비투입계획

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
R.J.P Machine	자동 제어 전유압식	대	2
초고압 Pump	300~800㎏f/㎠	대	2	경화재용
〃	〃	대	1	수 용
Cement Silo	50 ton/基	대	2
Mixer	1 ㎥	대	2
Agitator	2 ㎥	대	2
수 조	10 ㎥	대	2
Air Comp	825 CFM	대	2
3중관 Rod	Φ 89 m/m	조	20
발 전 기	150 KWH	대	2
Back Hoe	0.3 ㎥ 用	대	1	(작업장 정지 및 이토 작업)
Air Hose	20 m	롤	10
초고압 Hose	20 m	롤	10
물 차	16M3	대	1
기타 잡자재		식	1

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	현 장 조 직 도	PAGE: 1 OF 1

9. 현장 조직도

		소 장
		공 사 대 리(공무)
		반 장			B / H	1 인
					물 차	1 인
천 공				P L A N T
기 사	2 인			기 사	2 인

(2 Plant 기준)

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	시 공 순 서	PAGE: 1 OF 1

10. 시공순서(MRJP공법도 동일)

1. 설치(設置)	2. 삭공(削孔)	3. 분사(噴射) Test
R.J.P 기계를 소정의 시공 위치에 이동하여 세운다.	지반 상황에 맞추어 압력 회전 Stroke 속도 등에 의해 계획 심도까지 삭공한다.	계획 심도까지 삭공한 후 회전속도, 인상 속도를 설정 분사 Test 행한다.

M-RJP

M-RJP

4. R.J.P GROUTING 조성(造成)	5. R.J.P GROUTING 조성 완료(造成 完了)
소정 인상 속도 Monitor(Rod)의 회전 및 반전에 의해 Pile을 조성한다.	Rod 인발 세정 구멍 메우기 조성완료후 Rod는 지상까지 인발하여 공구를 메우고 관내를 세정한다.

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	작업 FLOW	PAGE: 1 OF 1

11. 작업 FLOW

		준 비
		운 반 (장 비)				자 재 운 반
		Plant 조립 설치
작업장 정지 작업 및 측량 확인
		장비 Setting
								Jetting Machine 이동
		삭 공 (削孔)
심도별 지층 확인
		분 사 Test				반
굴착 심도 확인						복
		조 성 공				작
						업
		Rod 인 발
이 토 처 리
		기 구 세 척
		Plant 해체 철거

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	장 비 배 치 도	PAGE: 1 OF 1

12. 장비 배치도(MRJP공법도 동일)

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	품 질 관 리 계 획	PAGE: 1 OF 1

13. 품질관리계획

13.1  품질관리계획

13.1.1  각 공마다 장비의 거치상태, 수직도 및 CTC를 확인한다.

13.1.2  천공시에 천공수와 함께 분출되는 토사의 상태를 관찰하면서 설계 당시의                 지반과 같은지를 확인한다.

13.1.3  분사 작업시 발생하는 SLIME 분출 상태의 토사와 교반된 상태를 확인하며                 최적의 배합비가 되도록 조절한다.

13.1.4  천공장비와 고압펌프 플랜트 상호간의 연락을 긴밀히 하여 인발속도 및 회                전수에 따라 분사압력과 고화재의 주입량등을 철저히 관리한다.

13.2  품질검사계획

13.2.1 육안확인 : 시공지점을 BACK-HOE를 이용 굴착하여 조성체를 육안으로 확인                           한다.

13.2.2 확인 CORING

R.J.P GROUTING 작업이 완료된 후 유효경 중앙지점에 CORE BORING을 실                   시하여 R.J.P GROUTING 조성 상태 확인 및 채취된 CORE에 대한 일축압축                  강도 시험을 실시한다.

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	안 전 관 리 계 획	PAGE: 1 OF 2

14. 안전관리계획

14.1  안전시공 관리 체계도

안전조회				작업종료전정리정돈		작업종료후정리정돈
	→	작업중 지도,감독	→
					→
	→	작업중 안전점검	→

14.2  안전조회

작업 개시전 5-10분정도 다음 사항들을 선택하여 전달한다.

①  당일주요 작업내용

②  특별히 위험한 작업 및 장소

③  전일 점검 결과 전달 및 대책

④  재해사례(자사,타사,동종공종의 재해사례등)를 전달

⑤  신입자의 소개

⑥  안전훈시 또는 안전교육

⑦  복장,보호구,신체 및 건강상태확인, 출석등의 점호 및 점검

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	안 전 관 리 계 획	PAGE: 2 OF 2

14.3  작업중 지도, 감독

안전 담당자와 작업반장은 안전점검에서 발견되거나 작업중 나타나는 다음                사항의 이상 상태는 발견 즉시 시정하도록 노력한다.

① 안전시설미비, 기계의 이상, 공구의 불량 및 작업환경의 변화

② 불안전한 행동 (작업표준 무시, 보호구를 착용하지 않고 작업실시등) 및                  신규채용자에 대한 배치

③ 미비,불량 및 이상 발견장소는 시정 또는 작업 중지

14.4  작업종료전 정리정돈

①  작업종료 5분전 다음 요령으로 현장소장이 솔선수범으로 실시

②  재료, 폐자재, 임시 적재자재, 적재장소등의 정리정돈

③  정리정돈의 직종별 책임자 확인

14.5  작업종료후 확인

①  다음날 작업의 준비 유무검토와 조정

②  연장작업 내용들에 대한 원도급자에게 연결

③  사무정리 및 사후 정리정돈 상황의 확인

④  전원의 개폐확인

⑤  원도급자에게 종료보고

14.6  일반 안전대책

안전모는 백색을 착용하고, 회사별 구분을 표시하며, 안전화 및 안전조끼등

개인보호구를 필히 착용한다.

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	환 경 관 리 계 획	PAGE: 1 OF 1

15. 환경관리계획

*. 분진 최소화 - 그라우팅 플랜트내의 물탱크를 최대한 이용하여 분진방지에

최대한 노력한다.

*. 폐기물 적법처리 - 시공 진행중 발생되는 건설폐기물 수거 및 처리는 해당                                  적법업체에 위임처리한다.

*. 주위 시설물이나 자연환경을 훼손하지 않도록 장비 투입시나 철수시 그리고

장비이동시 현장책임자 및 감독관의 지시에 의해 안전하고 적당한 곳에                   장비를 위치한다.

*. 작업종료 전에는 환경관리에 대한 교육을 실시하고, 숙지하며, 이를 이행하며

작업종료 후에는 정리정돈을 철저히 수행한다.

*. 폐유처리는 적법업체를 선정하여 위임처리한다.

	시 공 계 획 서	개정번호(Rev.NO): 0
		제정날짜(Rev.DATE): 20/05/09
	CHECK LIST	PAGE: 1 OF 1

공사명/공종	목포북항 하수종말처리시설 건설공사(차집관로) / (R.J.P 공법)

NO	검 사 기 준	검사일자	검사기록	판 정
1	시공위치는 정밀하게 측량하였는가
2	줄파기의 위치 및 깊이는 적정한가
3	플랜트 설치는 모든 제반 여건에 부합하는가
4	플랜트 설치후 시운전을 하였는가
5	CEMENT PASTE 토출상태 양호한가?
6	천공작업은 규정에 맞는 장비로 시행하는가
7	천공 및 안전시설물은 설치하였는가
8	천공의 위치, 깊이, 간격은 적정한가
9	발전기는 누전의 위험이 없는가
10	시공시 토피는 최소 1.5m이상 유지되는가
11	천공수의 처리는 하고있는가
12	주입방법과 압력 및 심도는 적정한가
13	주입재의 배합은 규정대로 시행되는가
14	주입량의 기록관리를 하는가
15	주입재료의 사용량 및 잔량기록은 실시하는가

귀중

(차집관로 RJP. MRJP공사)

시 공 계 획 서

문서번호 :