강관 PILE 기초

1. 장 비 조 합

- PILE DRIVER (SP-110)

- AUGER MOTOR (150P)

- 발전기 (380K, 110K)

- COMPRESSOR (25K)

- SERVIVE CRANE (70T ～ 80T)

- AIR HAMMER & BUTTON BIT (D250 ～ D1000)

* 당시 보유 SP110 PILE DRIVER는 주,부장비 모두 방음, 방진 설계되어 도심지 공사에       적합함.

2. 평 균 심 도 (M)

심 도 지층별	평 균 심 도	비 고
토 사 층	5.0
자 갈 층	2.0
풍 화 암 / 호 박 돌	7.0
연 암	1.0
계	15.0

3. 천 공 방 법

- 천 공 구 경     508 M/M

- AIR HAMMERING 및 CASING 동시굴진

- AVE, DEPTH    15.0 M

- HAMMERING 과 동시에 AIR SURGING

- 후속공정(H-BEAM, 모래채움, GROUTING 등등)후 CASING 인발

- CASING SHOE 및 CASING의 교체후 재추입

4. 천공 능력 산정

가. 천공능력 산출근거

AUGER (D-120HP) 지층별 천공능력                              (m/hr)

구 경 지층별	￠450m/	￠500m/	￠600m/	￠750m/	￠812m/	비 고
토 사 층	18	16	15	13	12.75
자 갈 층	11.25	10.1	9	8.4	7.8
풍화암/호박돌	4.5	3.7	3	3	3
연 암	2.25	1.5	0.75	0.75	0.75
계

(일본영단 품셈 및 부산지하철 품셈 적용)

나. 지층별 순수 천공능력 산정

엔진 부하율 감안, 시공능력 : 60 ～ 80 % ( E = 70% 적용)

(ALL ASING 공법상 CASING 부착시 풍화토층까지는 수평마찰력이 작용함.)

(m/hr)

구 경 지층별	￠450m/	￠500m/	￠600m/	￠750m/	￠812m/	비 고
토 사 층	12.6	11.2	10.5	9.1	8.9
자 갈 층	7.86	7	6.3	5.88	5.46
풍화암/호박돌	4.5	3.7	3	3	3
연 암	2.25	1.5	0.75	0.75	0.75
계

5. 천공 CYCLE TIME (공당 천공 소요시간)

T = (T1 + T2 + T3) / F + T4

T1 = 공당 장비이동 및 거치시간(SETTING),        50 MIN =0.833 HR

T2 = 지층별 천공시간

T3 = ROD 연결시간 (6, 5, 4, 3, 2, 1 M) 1 JOINT   30 MIN = 0.500 HR

T4 = CASING 용접시간 (1JOINT 3PIECE),         40 MIN = 1.333 HR

F(작업계수) = 0.9

가. 지층별 장비이동 및 거치시간 (T1) - HR

지 층 별	장비이동 및 거치시간	비 고
토 사 층	0.833 * 5.0 / 15.0 = 0.278
자 갈 층	0.833 * 2.0 / 15.0 = 0.111
호박돌/풍화암	0.833 * 7.0 / 15.0 = 0.389
연 암	0.833 * 1.0 / 15.0 = 0.056
계	0.834

나. 지층별 천공시간(T2) -HR

지 층 별	지층별 천공 시간	비 고
토 사 층	5.0 / 11.20 = 0.446
자 갈 층	2.0 / 7.0 = 0.286
호박돌/풍화암	7.0 / 3.70 = 1.892
연 암	1.0 / 1.50 = 0.667
계	3.291

다. ROD 연결삽입시간(T3) -HR

지 층 별	ROD 연 결 삽 입 시 간	비 고
토 사 층	0.500 * 5.0 / 15.0 = 0.167
자 갈 층	0.500 * 2.0 / 15.0 = 0.067
호박돌/풍화암	0.500 * 7.0 / 15.0 = 0.233
연 암	0.500 * 1.0 / 15.0 = 0.033
계	0.500

라. 지층별 CASING 용접시간(T5) - HR

1) CASING 이음용접개소 =  2회/공

2) CASING 이음용접시간 (수동 아아크 용접기 사용)

40 MIN * 2회 / 60 = 1.333 HR/공

지 층 별	장비이동 및 거치시간	비 고
토 사 층	1.333 * 5.0 / 15.0 = 0.444
자 갈 층	1.333 * 2.0 / 15.0 = 0.178
호박돌/풍화암	1.333 * 7.0 / 15.0 = 0.622
연 암	1.333 * 1.0 / 15.0 = 0.089
계	1.333

마. 지층별 총소요시간 - HR

T = (T1 + T2 + T3) / F + T4 ,   F + 0.8 + 0.05 + 0.05 = 0.9

지 층 별	장비이동 및 거치시간
토 사 층	0.278 + 0.446 + 0.167 / 0.9 + 0.444 = 1.434
자 갈 층	0.111 + 0.286 + 0.067 / 0.9 + 0.178 = 0.694
호박돌/풍화암	0.389 + 1.892 + 0.233 / 0.9 + 0.622 = 3.415
연 암	0.056 + 0.667 + 0.033 / 0.9 + 0.089 = 0.929
계	6.472

사. 지층별 시간당 천공능력 및 M당 천공시간 -HR

* 시간당 천공능력(Q) = 지층별심도/총소요시간

지 층 구 분	토 사 층	자 갈 층	호 박 돌	풍 화 암	연 암
총 소요시간 (HR)	1.434	0.694	3.415		0.929
시간당 천공능력 (H/HR) : Q	3.487	2.882	2.050		1.076

6. 기 계 경 비

가. 중 기 가 격

1) PILE DRIVER (SP-110)

-  555,460천원   (관세포함, 수입면장참조)

2) AUGER MOTOR

-  120,000천원   (부산 대창중기계 제작)

3) 발 전 기

-   35,387천원   (관세포함, 수입면장 참조)

4) COMPRESSOR

-   75,000천원   (관세포함, 수입면장 참조)

나. 기 계 손 료

1) PILE DRIVER (SP-110)

-  555,460천원  *  1,879 * 10       =  104,371 /HR

2) AUGER MOTOR (150HP)

-  120,000천원  *  1,848 * 10       =   22,176 /HR

3) 발 전 기 (380K)

-   35,387천원  *  2,860 * 10       =   10,121 /HR

4) COMPRESSOR (900CFM)

-   75,000천원  *  2,027 * 10       =   15,203 /HR

5) 천공 부속 장비 (ROD + HAMMER + BIT)

ROD : 18,800 천원  *  1,879 * 10    =   3,533 /HR

HAMMER : 15,000 천원  *  1,879 * 10    =   2.819 /HR

BIT :  9,000 천원  *  1,879 * 10    =   1.691 /HR

소   계                        8,043 /HR

합 계                              159,914 /HR

7. 재  료  비

◉ 연료 소모량 산정법

- 기준 1.  실제 대입법

	PILE DRIVER	발 전 기	COMP	CRANE	B/H	비 고
규 격	SP110 (70T)	350K 100K	25K	80T	0.8M3
대 수	1	1 1	3	1	1
HP	200	450 150	300	150	70
경 유	21.2	81.4 26.4	31.7	23.6	10.5
계	21.2	107.8	95.1	23.6	10.5	237

(L/HR)

- 기준 2.  마력수 대비 추정 산정법

- 연료 시간당, 마력당 소모량

DIESEL ENGINE : 0.22 ～ 0.24 L/PS/HR = 0.23 L/PS/HR

- 부하율(보통작업) : 66%

- 시간율 50/60 : 83%

- 시간당연료소모량  1,920 11P * 0.23 * 0.66 * 0.83   241.9 L/HR

1) 경  유    237.0 * 296원   =  47.184 원/HR

2) 잡  유   47,184 * 0.2      =  9.436 원/HR

계                      56,620 원/HR

8. 노  무  비  (2일 기준)

1) 조 종 원  :  2.0인 * 52,194 * 0   21,713 원/HR

2) 조    수  :  4.0인 * 44,184 * 0   36,761 원/HR

3) 중기조장  :  1.0인 * 57,402 * 0    2,353 원/HR

계                         60,827 원/HR

◉ 지층별 천공능력 (M/당)

구 분 지 층	시 간 당 천 공 능 력	재 료 비	노 무 비	기 계 경 비
시간당 금액		56,620	60,827	159,914
토 사 층	3.487	16,237	17,444	45,860
자 갈 층	2.882	19,646	21,106	55,487
전석층/풍화암	2.050	27,620	29,672	78,007
연 암	1.076	52,621	56,531	148,619

7. 지층별, M당 투입 인부

(종합건설기술용역)

	토 사 층	자 갈 층	호박돌/풍화암	연 암	비 고
시간당천공능력	3.487	2.882	2.050	1.0/6
중급 기술자(1인)	0.04	0.04	0.06	0.12
보 링 공 (3인)	0.11	0.13	0.18	0.12