1		총사업비 설계 적정성 검토(57조3항)

□ 요청 시기

○ 기본설계 : 기본설계 완료후 조달청에 설계적정성 검토 의뢰

○ 실시설계 : 완료 전(90%) 조달청에 설계적정성 검토 의뢰

※ 기본계획은 기본계획 고시 이전에 기획재정부에 협의(지침변경 없음)

□ 구비 서류(*별첨 - 검토요청서 내에 구체적인 구비서류 리스트 참조)

○ 검토 요청서 및 기초자료(사업설명자료, 예산현황 등)

○ 기본 및 실시 설계도서

□ 업무 흐름도(소요기간 : 15일)

(필요시)협의

요청서 작성 및 제출

▪ 외부전문가 검토의뢰

▪ 분야별 검토(D+9일)

【합동 토론회 실시】

- 외부전문가, 수요기관, 설계사, 조달청(D+10일)

수요기관에서 기재부 제출

(조달청 검토결과 첨부)

검토서(안) 작성(D+13일)

검토결과보고서 작성

※ 필요시 미협의부분검토의견서 작성

검토 결과 송부(D+15일)

검토내용 협의(필요시)

보완

중앙관서의장

조달청

▪ 요청서 접수 및 담당자 배정(D+1일)

※ 업무관련 문의 : 조달청 시설사업국 설계관리팀(☎ 070-4056-7465)

2		설계변경 사전 타당성 검토(58조2항)

□ 요청 시기

○ 설계변경으로 20억원이상 증가(보상비 포함)하는 설계변경이 발생한 경우 조달청에 설계변경 사전 타당성 검토 의뢰

□ 구비 서류(*별첨 - 검토요청서 내에 구체적인 구비서류 리스트 참조)

○ 검토 요청서 및 기초자료(사업설명자료 등)

○ 설계변경 도서 및 관련자료

□ 업무 흐름도(소요기간 : 15일)

D+15일

중앙관서의 장

조   달   청

①설계변경 검토요청

② 접수 및 담당배정

③변경 사유 검토

⑩ 검토결과 송부

요 청

⑨결과보고서 작성

검토결과 송부

D+1일

D+4일

⑤변경 설계도서 검토

⑥원가검토의 적정성

D+12일

④현장확인(필요시)

(필요시) + 2일

우선시공 부분(검토제외)

⑦ 검토서(안) 작성

⑪수요처에서 기재부 제출(조달청 협의결과 첨부)

▪(필요시)외부전문가 자문

- 구조 분야

- 토질 분야 등

기술부문 기술자문

(필요시)협의

⑧검토서에 대한 의견작성/제출

※ 업무관련 문의 : 조달청 시설사업국 설계관리팀(☎ 070-4056-7465)

□ 제출서류 양식(별첨)

1. 설계적정성 검토요청서 공문서 양식(기본설계, 실시설계)

2. 설계적정성 검토요청서(기본설계)

3. 설계적정성 검토요청서(실시설계)

4. 실시설계 수량산출기준서(양식)

5. 설계변경 사전타당성 검토요청서 공문서 양식

6. 설계변경 사전타당성 검토요청서