4

설계의 경제성 등 검토(VE)

□ VE(Value Engineering,가치공학) 정의

ㅇ 최소의 생애주기비용(Life Cycle Cost)으로 최상의 가치를 얻기 위한 목적으로 여러 전문분야가 협력하여 프로젝트의 기능분석을 통해 대안을 창출해 내는 체계적 절차

- 시설물의 필요한 기능을 확보하기 위하여 설계내용에 대한 경제성 및 현장적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토

* LCC: 초기투자비용(공사비, 설계비, 감리비, 보상비 등), 유지관리비용(점검 및 진단비, 관리비, 에너지비용, 보수비, 교체비, 보강비 등), 이용자비용, 사회․경제적 손실비용, 해체․폐기비용, 잔존가치 등 시설물의 생애주기 동안 발생하는 모든 비용

□ VE의 형태

구 분	원가절감형	기능향상형	혁신형	기능강조형
V =	F→	F↑	F↑	F↑
	C↓	C→	C↓	C↑

* Value = 기능(Function)/ 비용(Cost)

□ 설계VE 시행 시기별 비용절감 효과

ㅇ VE 시기가 빠를수록 비용절감 가능성 大, 소요비용 小, 개선효과 大

□ VE 대상

ㅇ 총공사비 100억원 이상 건설공사의 기본설계, 실시설계

※ 일괄ㆍ대안입찰공사, 기술제안입찰공사, 민간투자사업 및 설계공모사업 포함

ㅇ 실시설계 완료 후 3년 이상 지난 뒤  발주하는 건설공사

ㅇ 공사시행 중 공사비가 10% 이상 증가되는 설계변경 사항(단순물량증가, ESC는 제외)

ㅇ 기타 발주청 또는 시공자가 필요하다고 인정하는 공사

□ VE 운영체계

□ VE 전문가 자격의 종류