국토해양부 고시 제2010-000호

「건설기술관리법 시행규칙」 제59조제4항에 따라 “검측감리 현장참여자 업무지침서”를 다음과 같이 개정․고시합니다.

2010년 12월 30일

국토해양부장관

검측감리 현장참여자 업무지침서

제 1 장  일 반 사 항

제1조(목적) 이 지침은 「건설기술관리법」 제27조의2 및 같은 법 시행규칙 제59조제4항에 따른 검측감리업무의 세부절차 및 방법 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 지침의 적용범위는 검측감리를하는 건설공사의 발주청․감리전문회사 및 감리원․시공자(하도급업자를 포함한다)를 대상으로 한다.

② 이 지침은 검측감리용역 및 공사 계약문서를 작성할 때 계약문서에 포함하여야 한다.

③ 이 지침에서 검토․승인․통보를 위해 정한 기간은 필요한 경우 상호 협의하여 조정할 수 있다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

1. “검측감리”란 「건설기술관리법」(이하 “법”이라 한다) 제27조의2에 따른 감리를 말한다.

2. “감리전문회사”란 법 제28조에 따라 등록된 법인체를 말한다.

3. “시공자”란 「건설산업기본법」 제2조제5호에 따른 건설업자 및 「주택법」 제9조에 에 따라 주택건설사업을 등록한 자로서 공사를 도급받은 건설업자(하도급업자를 포함한다, 이하 같다)를 말한다.

4. “감리원”이란 법 제28조에 따른 감리전문회사에 소속되어 검측감리를 수행하는 자를 말한다.

5. “상주감리원”이란 「건설기술관리법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제61조제1항에 따라 현장에 상주하면서 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

6. “공사감독관”이란 공사계약일반조건 제16조에 규정된 업무를 수행하기 위하여 발주청이 임명한 기술직원 또는 그의 대리인으로 해당 공사 전반에 관한 감독업무를 수행하고 감리업무를 총괄하는 자를 말한다.

7. “설계서”란 공사시방서, 설계도면 및 현장설명서를 말한다. 다만, 공사 추정가격이 1억원 이상인 공사에 있어서는 공종별 목적물 물량이 표시된 내역서를 포함한다.

8. “공사계약문서”란 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

9. “감리용역 계약문서”란 계약서, 기술용역입찰유의서, 기술용역계약일반조건, 감리용역계약특수조건, 과업내용서 및 감리비 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

10. “감리기간”이란 감리용역계약서에 표기된 계약기간을 말한다. 시공자 또는 발주청의 사유로 인해 공사기간이 연장된 경우의 감리기간은 연장된 공사기간을 포함한 감리용역 변경계약서에 표기된 기간을 말한다.

11. “검토”란 시공자가 수행하는 중요사항과 해당 건설 공사와 관련한 발주청(공사감독관)의 요구사항에 대해 시공자 제출서류, 현장실정 등을 감리원이 숙지하고, 감리원의 경험과 기술을 바탕으로 하여 타당성 여부를 파악하는 것을 말한다.

12. “확인”이란 공사계약문서대로 공사를 실시하고 있는지의 여부 또는 지시·조정·승인·검사 이후 실행한 결과에 대하여 확인하는 것을 말한다.

13. “지시”란 발주청(공사감독관)이 감리원에게 또는 발주청(공사감독관)의 발의에 의해 공사감독관(감리원)이 시공자에게 소관업무에 관한방침, 기준, 계획 등을 일러주고 실시하게 하는 것을 말한다. 단, 지시사항은 계약문서에 나타난 지시 및 이행사항에 국한하는 것을 원칙으로 하며, 구두 또는 서면으로 내릴 수 있으나 지시내용과 그 결과는 반드시 확인하여 문서로 기록·비치하여야 한다.

14. “승인”이란 발주청(공사감독관) 또는 감리원이 시공 또는 감리업무와 관련하여, 이 지침에 나타난 승인사항에  대해 감리원 또는 시공자의 요구에 따라 그 내용을 서면으로 동의하는 것을 말한다. 승인 없이는 다음 단계의 업무를 수행할 수 없다.

15. “검사”란 공사계약문서에 나타난 시공단계와 재료에 대한 완성품 및 품질을 확보하기 위해 시공자의 확인검사에 근거하여 감리원이 완성품, 품질, 규격, 수량 등의 적정성을 확인하는 것을 말한다. 이 경우 시공자가 실시한 확인 결과 중 대표가 되는 부분을 추출하여 검사를 실시할 수 있으며 합격판정은 감리원이 한다.

16. “확인측량”이란 설계자 또는 시공자가 실시한 측량에 대하여 적정성 여부를 확인할 목적으로 실시하는 측량을 말한다.

17. “주요자재”란 지급(관급)자재와 철근, 철골, 레미콘, 아스콘, 강관파일 등 사급자재로 설계된 중요자재를 말한다.

제4조(발주청, 공사감독관, 감리원, 시공자의 기본임무) ① 발주청 및 공사감독관은 다음 각 호의 기본업무를 수행한다.

1. 발주청은 건설공사의 계획․설계․발주․감리․시공․사후평가 전반을 총괄하고, 감리 및 시공계약 이행에 필요한 다음 각호의 사항을 지원, 협력하여야 하며 감리용역계약에 규정된 바에 따라 감리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 감독을 한다.

가. 감리 및 시공에 필요한 설계도면, 문서, 참고자료와 감리용역계약문서에 명기한 자재·장비·비품·설비의 제공

나. 건설공사 시행에 필요한 용지 및 지장물 보상과 국가, 지방자치단체, 기타 공공기관의 허가․인가 등의 처분을 얻을 수 있도록 조치 또는 협력

다. 시공사 또는 감리원이 보고한 설계변경, 준공기한 연기요청, 기타 현장실정보고 등 방침 요구사항 및 각종 검토서에 대하여 공사업무수행에 지장이 없도록 의사를 결정하여 통보, 지시

2. 발주청은 「건설기술관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제26조에 따라 감리원을 관리할 수 있도록 감리용역 계약내용 및 감리원 배치내용 을 다음 각 호의 사유발생 7일 이내에 다음 구분에 따라 한국건설감리협회로 통보하여야 한다.

가. 감리용역 계약 및 변경계약시 : 규칙 별지 제4호서식에 따른 감리용역계약 및 변경계약현황 통보

나. 감리원의 배치 및 변경배치(업체선정 당시의 배치계획 및 당초 발주청에 제출한 배치계획과 다른 감리원을 배치하는 경우로서 영 제105조제9항에 의한 교체를 포함한다)시 : 규칙 별지 제5호서식에 의하여 통보

다. 감리용역 완료시 : 감리용역 완공내용을 규칙 별지 제4호서식에 따라 통보

② 공사감독관은 법 제35조 규정에 의하여 발주청에서 정한 “건설공사 감독자 업무지침”에 따라 감독업무를 성실히 수행하여야 한다.

③ 감리원은 다음 각 호의 기본임무를 수행하여야 한다.

1. 영 제105조제2항 및 규칙 제59조에 따른 감리원의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

2. 감리원은 해당공사의 특성, 공사의 규모 및 현장조건을 감안하여 현장별로 수립한 검측체크리스트에 따라 설계도서에서 정한 규격 및 치수 등에 대하여 시설물의 각 공종마다 육안검사․측량․입회․승인․시험 등의 방법으로 검측업무를 수행하여야 한다.

3. 시공자가 검측을 요청할 경우에는 즉시 검측을 수행하고 그 결과를 공사감독관에게 보고하고 시공자에게 통보하여야 한다.

4. 해당공사의 토석물량 및 반출․입 시기 등의 변동사항을 토석정보시스템(http://www.tocycle.com)에 즉시 입력․관리하여야 한다.

④ 시공자는 공사계약문서에서 정하는 바에 따라 현장작업, 시공방법에 대하여 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 시공하고, 정해진 기간 내에 완성하여야 하며, 공사감독관으로부터 재시공, 공사중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 이에 응하여야 한다

⑤ 발주청, 공사감독관, 감리원, 시공자간의 공사시행 단계별 업무내용은 부록을 참고 한다.

제5조(감리원의 근무수칙)① 감리업무에 종사하는 자는 업무수행 시 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 해당공사의 공사계약문서, 감리과업내용서, 그 밖의 관계규정 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감리업무를 수행하여야 한다.

2. 감리전문회사 대표자 및 감리원은 해당 공사시행 중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관의 수감요구 및 문제발생으로 인한 발주청의 출석요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해로 피해자가 소송제기시 국가지정 소송업무에  적극 협력하여야 한다.

② 감리원은 다음 각 호에 따라 현장근무를 하여야 한다.

1. 감리원은 공사현장(공사와 관련한 외부 현장점검, 확인 등 포함)에 상주하여야 하며 업무 또는 부득이한 사유로 1일 이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 감리업무일지에 기록하고 서면으로 공사감독관의 승인(긴급시 유선승인)을 받아야 한다.

2. 감리원은 당일 근무위치 및 업무내용 등을 근무상황판(별지 제4호의2서식)에 기록하여야 한다.

3. 감리전문회사는 감리업무에 종사하는 감리원이 감리업무수행기간 중 법,  「민방위기본법」 또는 「향토예비군설치법」에 의한 교육을 받는 경우나 근로기준법에 따른 유급휴가로 현장을 이탈하게 되는 경우에는 감리업무에 지장이 없도록 동일현장의 감리원을 직무대행자로 지정하고 업무 인계인수를 하는 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

4. 감리원은 발주청의 요청이 있는 경우 또는 시공자가 공사감독관의 승인을 득하여 초과근무를 하는 경우에는 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한 회계예규(기술용역 계약일반조건)에서 정하는 바에 따른다.

5. 감리전문회사는 감리현장이 원활하게 운영될 수 있도록 감리용역비중 직접경비를 감리대가기준에 따라 적정하게 사용하여야 하며, 발주청이 요구할 경우 직접경비의 사용에 대한 증빙을 제출해야한다.

제5조의2(감리원의 청렴의무 등) ① 감리원은 공정하게 권한을 행사하여야 하며, 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

② 감리원은 직위를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 이권에 개입․알선․청탁하여서는 아니된다.

③ 감리원은 차량･건설기자재･항공기･선박 등 공용물을 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용하여 이익을 얻는 행위를 하여서는 아니된다.

④ 감리원은 담당업무와 관련하여 업무관련자로부터 일체의 금전･부동산･선물 또는 향응 등의 수수행위를 하여서는 아니된다.

제6조(공사감독관의 업무범위) ① 공사감독관은 감리용역계약문서 내용에 따라 다음 각 호의 사항에 대하여 감리원을 감독한다.

1. 감리원의 적정자격 보유 여부 및 상주 이행상태

2. 품위손상 여부 및 근무자세

3. 발주청 지시사항의 이행상태

4. 행정서류 및 비치서류 처리상태

5. 각종 보고서의 처리상태

6. 감리용역비중 직접경비(감리대가기준)의 현장지급여부 확인

② 공사감독관은 해당 공사의 수행에 따른 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원업무 및 감리원의 지도․감독업무를 수행하며 현장에 상주하는 것을 원칙으로 한다.

③ 공사감독관은 시공전에 감리원 및 시공자와 합동으로 다음 각 호의 사항에 대하여 유관기관 합동회의를 실시하여 이의 조정 또는 변경 여부를 검토하여 사후에 민원 등이 야기되지 않도록 하여야 한다.

1. 전력 및 통신시설

2. 급․배수시설

3. 도시가스시설

4. 방음벽, 육교, 지하통로, 버스정차장 및 지역편의 시설 등

④ 공사감독관은 유관기관 관련자 합동회의와 현지 여건조사, 설계서의 공법검토 등을 통하여 민원발생이 예상되는 사항을 사전에 도출하는 등 민원발생의 원인 제거 또는 최소화를 위해 노력하여야 한다.

제7조(행정업무) ① 감리전문회사는 계약체결 즉시 감리원 투입 등 검측감리업무 수행계획을 발주청에 보고하여야 하며, 계약서상 착수일에 감리용역을 착수하여야 한다. 단, 감리대상 건설공사의 전부 또는 일부의 용지매수 지연 등으로 계약상 착수일에 감리용역을 착수할 수 없는 경우에는 발주청은 실착수 시점 및  감리원 투입시기 등을 조정, 통보하여야 한다.

② 감리전문회사는 감리용역 착수시 다음 각 호의 서류를 첨부한 착수 신고서를 제출하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

1. 검측감리업무수행계획서

2. 감리비 산출내역서

3. 감리원 지정신고서와 감리원 경력확인서

4. 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 및 담당 업무

③ 입찰참가자격사전심사에 의해 감리전문회사로 선정된 경우에 있어 제2항제3호의 감리원은 입찰참가제안서에 명시된 자로 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 교체가 필요한 경우에는 기술자격, 학․경력 등을 종합적으로 검토하여 감리업무수행 능력이 저하되지 않는 범위내에서 발주청의 사전승인을 받아야 한다.

④ 발주청은 제2항제3호 및 제4호의 내용을 검토하여 감리원 또는 감리조직 구성내용이 해당 공사현장의 공종 및 공사 성격에 적합하지 않다고 인정할 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 감리전문회사에 변경을 요구할 수 있으며, 변경 요구를 받은 감리전문회사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

⑤ 감리원은 감리착수 즉시 사무소, 숙소 또는 비상연락처의 전화번호 및 FAX, 우편 연락처 등을 발주청(공사감독관)에  보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하고 변경되었을 경우에도 보고토록 한다.

제8조(설계서 등의 검토) 감리원은 설계도면, 시방서, 산출내역서, 공사계약서 등의 계약내용과 해당 공사의 조사설계 보고서 등의 내용을 숙지하여야 한다.

제9조(설계서 등의 관리) ① 감리원은 착공과 동시에 공사 설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주청으로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자 이외의 자에게 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부 유출시 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

② 감리원은 공사의 여건을 감안하여 각종 법규정, 표준시방서, KS규정집 및 필요한 기술서적을 비치하여야 한다.

제10조(공사표지판 등의 설치) 공사감독관은 시공자가 공사안내표지판을 설치하는 경우 시공자로부터 표지판의 제작방법, 크기, 설치장소 등이 포함된 표지판 제작설치 계획서를 제출 받아 검토하여야 한다.

제11조(측량기준점 보호 등) ① 감리원은 발주청이 설치한 용지말뚝, 삼각점, 도근점, 수준점 등의 측량기준점을 시공자가 이동 또는 손상시키지 않도록 하여야 하며, 이설이 필요한 경우에는 정해진 위치를 찾아낼 수 있는 보조말뚝을 반드시 설치하도록 하여야 한다.

② 감리원은 공사시행상 수위를 측정할 경우에는 관측이 용이한 위치에 수위표를 설치하여 상시 관측할 수 있게 하여야 한다.

③ 감리원은 시공자에게 토공 및 각종 구조물의 위치, 고저, 시공범위, 방향등을 표시하는 규준시설 등을 설치하도록 하고, 시공전에 반드시 확인․검사를 하여야 한다.

제12조(확인측량실시) 감리원은 착공 즉시 시공자로 하여금 다음 각호의 사항과 같이 발주 설계도면과 실제 현장의 이상 유무를 확인하기 위하여 확인측량을 실시하도록 하여야 한다.

1. 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP) 등의 측량기준점의 위치(좌표)를 확인하고, 기준점은 공사시 유실방지를 위하여 필히 인조점을 설치하여야 하며, 시공중에도 활용할 수 있도록 인조점과 기준점과의 관계를 도면화하여 비치하여야 한다

2. 공사 준공까지 보존할 수 있는 가수준점(TBM)을 시공에 편리한 위치에 설치하고, 국토지리정보원에서 설치한 주변의 수준점 또는 발주청이 지정한 수준점으로부터 왕복 수준측량을 실시하여 「공공측량의 작업규정 세부규정」에서 정한 왕복 허용오차 범위 이내일 경우에 측량을 실시하여야 한다.

3. 인접공구 또는 기존시설물과의 접속부 등을 상호확인 및 측량결과를 교환하여 이상유무를 확인한다.

제13조(확인측량 결과의 처리) ① 감리원은 현지 확인측량결과 설계내용과 상이할 때는 공사감독관에 측량결과를 보고하여야 한다.

② 건축공사 현장의 감리원은 필요한 경우 지적법에 따라 확인 측량된 대지 경계선내의 공사용 부지에 시공자로 하여금 전체동의 건축물을 배치하도록 하여 도로에 의한 사선제한, 대지경계선에 의한 높이제한, 인동간격에 의한 높이제한 등 건축물 배치와 관련된 규정에 적합한지 여부를 확인하고, 건축물 배치도면을 작성하게 하여 발주청(공사감독관)에 보고하여야 한다.

제14조(공사 관련자 회의) 감리원은 공사감독관이 주관하는 관련자 합동회의에 참석하고 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

제15조(감리업무 기록관리와 발주청 보고) ① 감리원은 다음 각 호의 문서가 포함된 감리보고서를 매월 또는 분기마다 작성하여 발주청에 보고하여야 한다.

1. 감리원 업무일지(별지 제4호서식)

2. 구조물별 콘크리트 타설현황(작업자 명부를 포함한다)(별지 제6호서식)

3. 검측요청⋅결과통보내용(별지 제7호서식)

4. 주요구조물의 단계별 시공현황(별지 제10호서식)

5. 콘크리트 구조물 균열관리 현황(별지 제11호서식)

6. 공사사고 보고서(별지 제12호서식)

7. 그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

② 감리원은 해당 감리용역이 완료된 후에 다음 각 호의 내용이 포함된 최종감리보고서를 감리용역기간의 만료일부터 14일 이내에 감리전문회사 대표자 명의로 발주청에 제출하여야 한다.

1. 건설공사 및 감리용역 개요 등(별지 제13호 내지 제15호서식)

2. 검측내용 실적 종합(별지 제17호서식)

3. 그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

③ 감리원은 감리업무수행상 필요한 경우에는 다음 각 호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성․비치하여야 한다.

1. 품질시험계획(별지 제26호서식)

2. 품질시험․검사성과 총괄표(별지 제27호서식)

3. 시험․검사 실적보고서(별지 제28호서식)

4. 검측대장(별지 제29호서식)

5. 발생품(잉여자재) 정리부(별지 제30호서식)

④ 감리원은 시공자가 작성한 공사일지를 제출받아 확인한 후 보관하여야 한다.

제16조(수명사항의 처리) 감리원이 공사감독관으로부터 지시를 받았을 때에는 신속하게 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행결과를 점검․확인하여 서면으로 조치결과를 보고하여야 한다

제17조(사진촬영 및 보관) ① 감리원은 시공자로 하여금 공종별로 착공전부터 준공때까지의 공사과정, 공법, 특기사항을 촬영한 촬영일자가 나오는 공사사진과 시공일자, 위치, 공종, 작업내용 등을 기재한 공사내용 설명서를 제출토록 하여 후일 참고자료로 활용토록 한다. 공사기록 사진은 공종별, 공사추진단계에 따라 다음 각 호의 사항을 촬영한 것이어야 한다.

1. 주요한 공사현황은 착공전, 시공중, 준공 등 시공과정을 알 수 있도록 가급적 동일장소에서 촬영

2. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분

가. 암반선 확인 사진

나. 매몰, 수중 구조물

다. 구조체공사에 대해 철근지름, 간격 및 벽두께, 강구조물(steel box내부, steel girder 등) 경간별 주요부위 부재두께 및 용접전경 등을 알 수 있도록 촬영

라. 공장제품 검사(창문 및 창문틀, 철골검사, PC 자재 등) 기록

마. 지중매설(급․배수관, 전선 등) 광경

바. 매몰되는 옥내외 배관(설비, 전기 등) 광경

사. 전기 등 배전반 주변에서의 배관류

아. 지하매설된 부분의 배근상태 및 콘크리트 두께현황

자. 바닥 및 배관의 행거볼트, 공조기 등의 행거볼트 시공광경

차. 보온, 결빙방지관계 시공광경

카. 본 구조물 시공 이후 철거되는 가설시설물 시공광경

② 감리원은 특히 중요하다고 판단되는 시설물에 대하여는 공사과정을 비디오테이프 등으로 촬영토록 하여야 한다.

제18조(품질관리(또는 시험)계획의 관리) 감리원은 품질관리계획 또는 품질시험계획이 발주청(공사감독관)으로부터 승인되기 전까지는 원칙적으로 시공자로 하여금 해당업무를 수행하게 하여서는 안 된다.

제19조(품질관리(또는 시험)계획의 이행확인) 감리원은 시공자가 작성한 품질관리(또는 시험)계획서에 따라 품질관리 업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 검사하여 그 결과를 공사감독관에게 보고하여야 하며 공사감독관은 시정이 필요한 경우에는 시공자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 시공자는 이를 지체 없이 시정하여야 한다.

제20조(품질시험․검사 요령) ① 감리원은 시공자가 작성한 품질관리(또는 시험)계획서에 따라 품질시험․검사가 실시되는지를 확인하여야 한다.

② 감리원은 품질시험과 검사를 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격, 법 제24조의 규정에 의한 품질관리기준에 의하여 실시되는지 확인하여야 한다.

③ 감리원은 시공자로부터 매월 품질시험․검사실적을 종합한 시험․검사실적보고서(별지 제28호서식)를 제출받아 이를 확인하여야 한다.

제21조(시험․검사성과 확인) 감리원은 시공자가 발주청에 해당 건설공사에 대한 기성부분 검사 또는 예비 준공검사  신청시 별지 제27호서식에 따라 제출한 품질시험․검사성과총괄표를 검토․확인하여야 한다.

제22조(시공상세도 검토) 감리원은 시공자로부터 구조물 시공상세도 및 암발파작업 시공상세도를 사전에 제출받아 검토한 후 그 결과를 공사감독관에게 보고하여야 한다.

제23조(일일작업실적 및 계획서의 검토·확인) ① 감리원은 시공자로부터 다음 날 작업계획서를 제출받아 일일 감리업무 수행계획에 참고하여야 한다.

② 감리원은 시공자로부터 금일 작업실적이 포함된 시공자의 공사일지 또는 작업일지 사본(시공회사 자체양식)을 참조하여 금일작업실적과 사용자재량, 품질관리시험회수 및 성과 등이 서로 일치하는지 여부를 검토한 후 감리일지에 기록한다.

제24조(시공 확인) ① 감리원은 다음 각 호의 현장시공 확인업무를 수행하여야 한다.

1. 시공 시에는 해당 공사의 설계도면, 시방서 및 관계규정에 정한 공종을 반드시 확인

2. 시공자가 측량하여 말뚝 등으로 표시한 시설물의 배치위치를 야장 또는 측량성과를 시공자로부터 제출 받아 시설물의 위치, 표고, 치수의 정확도 확인.

3. 수중 또는 지하에서 행하여지는 공사나 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 반드시 직접 검측하여 시공당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공 내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하고, 발주청 등의 요구가 있을 때에는 이를 제시.

② 감리원은 단계적인 검측으로 현장 확인이 곤란한 콘크리트 타설 공사는 반드시 입회․확인하고 그 결과를 공사감독관에게 보고하여야 한다.

③  감리원은 콘크리트 품질을 저하시키는 행위 등이 없도록 현장입회 확인을 철저히 하고, 구조물별 콘크리트 타설현황(별지 제6호서식)을 작성하여 감리보고서에 수록하여야 한다.

제25조(검측업무) ① 감리원은 시공계획서에 의한 일정단계의 작업이 완료되면 시공자로부터 검측요청서(별지 제5호서식)를 제출받아 그 시공상태를 확인하여야 한다.

② 감리원은 다음 각 호의 사항이 유지될 수 있도록 검측 체크리스트를 작성하여야 한다.

1. 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 승인

2. 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전 예방하여 충실한 현장확인 업무를 유도

3. 검측작업의 표준화로 작업원들에게 작업의 기준 및 주안점을 정확히 주지시켜 품질향상을 도모

4. 객관적이고 명확한 검측결과를 시공자에게 제시하여 현장에서의 불필요한 시비를 방지하는 등의 효율적인 검측업무를 도모.

③ 감리원은 다음 각 호의 검측업무 수행 기본방향에 따라 검측업무를 수행하여야 한다.

1. 현장에서의 시공확인을 위한 검측은 해당 공사의 규모와 현장조건을 감안한『검측업무지침』을 현장별로 작성․수립하여 발주청의 승인을 득한 후 이를 근거로 검측업무를 수행. 다만, 「검측업무지침」은 검측하여야 할 세부공종, 검측절차, 검측시기 또는 검측빈도, 검측 체크리스트 등의 내용을 포함.

2. 수립된 검측업무지침은 모든 시공관련자에게 배포하여 주지시켜야 하고, 보다 확실한 이행을 위한 교육실시

3. 현장에서의 검측은 체크리스트를 사용하여 수행하고, 그 결과를 검측체크리스트에 기록한 후 공사감독관에게 보고

4. 검측체크리스트에는 검사항목에 대한 시공기준 또는 합격기준을 기재하여 검측결과의 합격 여부를 합리적으로 신속히 판정.

5. 단계적인 검측으로는 현장 확인이 곤란한 콘크리트 생산, 타설과 같은 공종의 시공 중 감리원의 계속적인 입회 확인 하에 시행

6. 시공자가 검측요청서를 제출할 때 공사 참여자 실명부가 첨부되었는지를 확인

7. 시공자가 요청한 검측일에 감리자 사정으로 검측을 못할 경우 공정추진에 지장이 없도록 요청한 날 이전 또는 휴일검측을 하여야 하며 이때 발생하는 감리대가는 감리자 부담으로 한다

④ 감리원은 다음 검측절차에 따라 검측업무를 수행하여야 한다

1. 검측체크리스트에 의한 검측은 1차적으로 시공자의 담당기술자가 점검하여 합격된 것으로 확인한 후, 그 확인한 검측체크리스트를 첨부하여 검측요청서를 감리원에게 제출하면 감리원은 1차 점검내용을 검토한후, 현장확인 검측을 실시하고, 그 결과를 서면으로 통보.

2. 검측결과 불합격인 경우는 그 불합격된 내용을 시공자가 명확히 이해할수 있도록 상세하게 첨부하여 통보하고 보완시공 후 재검측 받도록 조치

〈 검  측  절  차 〉

현장시공 완 료		→	시 공 자 담당기술자 점 검				→		검측요청서 제 출		→			감 리 원 현장검측		→	검측결과 보고(공사감독)			합격 →		다음단계 공종착수
									(시공점검표, 시험성과)
			재시공, 보 완						불합격시

⑤ 감리원은 검측할 검사항목 (Check Point)을 계약설계도면, 시방서, 건설기술관리법, 본 지침서 등의 관계규정 내용을 기준하여 구체적인 내용으로 작성하며 공사목적물을 소정의 규격과 품질로 완성하는데 필수적인 사항을 포함하여 점검항목을 결정하여야 한다.

⑥ 감리원은 검측할 세부공종과 시기를 작업단계별로 정확히 파악하여 검측하여야 한다.

〈철근콘크리트 암거의 검측 세부공종 및 검측시기 (예)〉

검 측 세 부 공 정	Code No.	검측시기(후속작업)
1.구조물 배치 위치 측량		터파기 작업착수전
2.터파기		Lean Concrete 타설 준비작업전 또는 조약돌 포설전
3.Lean Concrete 타설 준비 작업		Lean Concrete 타설전
4.Lean Concrete 타설 상태		바닥 스라브 철근 배근 작업전
5.바닥 스라브 배근		바닥 스라브 Concrete 타설전 바닥 스라브 Concrete 거푸집 설치전
6.바닥 스라브 거푸집 및 줄눈 설치		Concrete 타설 준비작업
7.바닥 스라브 Concrete 타설 준비작업		바닥 스라브 Concrete 타설전
8.바닥 스라브 Concrete 타설 상태		벽체 내부거푸집 설치전
9.벽체 내부거푸집		벽체 철근 조립전
10.벽체 철근 조립		벽체 외부 거푸집 설치전
11.벽체 외부거푸집 및 줄눈 설치		벽체 Concrete 타설 준비작업전
12.벽체 Concrete 타설 준비작업		벽체 Concrete 타설전
13.스라브 동바리, 거푸집, 줄눈설치		스라브 철근 조립전
14.스라브 철근 조립		스라브 Concrete 타설 준비작업전
15.스라브 Concrete 타설 준비작업		스라브 Concrete 타설전
16.스라브 Concrete 타설상태 및 양생상태		스라브 Concrete 타설후
17.Concrete 표면 검사		거푸집 제거후 뒷채움 작업전

제26조(암반선 확인) ① 발주청은 공사착공 즉시 암판정위원회를 상시 구성․운영하고 암반선 노출 즉시 암판정을 실시하도록 하여야 하며 직접 육안으로 확인하고, 정확한 판정을 위해 필요한 추가 시험을 실시하여야 한다.

② 암판정 준비 및 절차는 다음 각 호와 같은 요령으로 실시한다.

1. 암판정 대상은 절토부 암선 변경시와 구조물 기초(암거, 교량 등), 터널 암질변경시 등에 대하여 실시

2. 암판정 요청 체계도

시공자	→	현장감리원	→	공사감독관	→	암판정위원회	→	조사및판정

3. 암판정위원회는 암판정 대상 공종의 중요성, 수량, 시공현장여건 등을 종합적으로 고려하여 공사감독관, 감리전문회사 소속의 토질 및 기초분야 직원(건축공사의 경우는 토목분야 직원을 말한다) 등을 포함하여 발주청에서 구성하고 시공회사의 현장대리인은 반드시 입회

4. 준비사항 및 수행방법

가. 절토부 암판정을 할 때에는 측량기, 줄자, 카메라,  깃발 등을 준비하고 물량 증감 현황표,  토적표, 횡단도(암질 구분표시), 공사비 증감대비표등 첨부

나. 구조물 기초 암판정을 할 때에는 주상도 작성(당초와 변경 비교), 종․평면도, 측량성과표, 시공계획(기초에 대한 의견서), 기초확인 측량시 사진촬영 보관(근경, 원경), 시추와 굴착에 의한 시료함을 보관(시험실 비치)하고 다음 양식에 의거 보고

공구	구조물명	부 위	E․L(m)		차 이	설계기초 암반종류	설계분포 암반종류
			당 초	변 경

다. 터널 암판정을 할 때에는 주상도, 측량성과표, 굴착천공표, 종․평면도, 사진, 현장 시험실에 단면별 시료채취 보관함 비치, 터널굴착(막장)별 관리 대장을 기록 비치하고 설계조건과 상이한 암질변화시 굴착방법과 보강방법을 임의대로 하지 말고, 암판정위원회의 심의를 거친후 시행하며 다음 양식에 의거 보고

터 널 명	위 치	설계굴착 TYPE	검측요청일시	비 고
				낙반 여부 및 응급조치 사항

제27조(주요 기자재 공급원의 검토) ① 감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 기자재(레미콘․아스콘․철근․H형강․시멘트 등) 공급원 승인신청서를 자재반입 10일 전까지 제출토록 하여야 한다. 다만, 관련법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

② 감리원은 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 검토하고 공사감독관은 품명, 공급원, 납품실적, 감리원의 검토의견 등을 고려하여 적합한 것으로 판단될 경우에는 이를 승인한다.

③ 감리원은 레미콘, 아스콘의 공급원 승인신청서에는 생산공장에서 저장한 골재의 품질 즉, 입도, 마모율, 조립율, 염분함유량 등에 대한 품질시험을 직접 실시하거나 발주청에 의뢰, 실시하여 합격여부를 판단하여야 하며 공급원의 일일생산량, 기계의 성능, 각종 계기의 정상적인 작동 유무, 사용재료의 골재원 확보 여부, 동일골재(품질, 형상 등)로 지속적인 사용가능 여부, 현장도착 소요시간 등에 대하여 사전에 충분히 조사하여 공사기간중 지속적인 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

④ 감리원은 공급원 승인을 받은 후에도 반입사용자재에 대한 품질관리시험 및 품질변화 여부 등에 대하여 수시 확인하여야 한다.

제28조(주요 기자재 및 지급자재의 검수 및 관리) ① 감리원은 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재 등의 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면 시공자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수한 후 공사감독관에게 보고하고 그 결과를 검수부에 기록 비치하여야 한다.

② 감리원은 시공자로 하여금 현장에 반입된 기자재가  도난 또는 훼손․유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리․저장하도록 하여야 하고 공사 현장에 반입된 모든 주요자재는  시공자 임의로 공사현장외로 반출하지 못하도록 주요자재 검사 및 수불부(별지 제8호서식)를 작성하여 관리하여야 한다.

③ 감리원은 현장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재에 대하여는 시공자와 공동 입회하여 생산 공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험성과를 사전에 검토하여 품질을 확인하고 그 결과를 공사감독관에게 보고하여야 한다.

④ 감리원은 자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 치수 등을 검사하여야 하며, 공사현장이 아닌 장소에서 가공 또는 조립되어 반입되는 자재가 있는 경우 반입자재의 가공 또는 조립에 사용된 각각의 재료 또는 부품 등이 설계도서 및 시방서의 관련규정에 적합한지 여부를 확인해야 한다.

⑤ 감리원은 이형봉강, 벌크 시멘트 등은 필요시 공인계량소에서 계량하여 반입량을 확인한다.

⑥ 감리원은 지급자재에 대한 검수조서를 작성할 때 시공자가 입회․날인토록 하고, 검사조서는 발주청(공사감독관)에게 보고하여야 한다.

감리원은 잉여지급자재가 발생하였을 때는 품명, 수량 등을 조사하여 공사감독관에게 보고하여야 하며, 시공자로 하여금 지정장소에  반납하도록 하여야 한다

제29조(사고처리) 감리원은 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 시공자에게 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 하고 공사감독관에게 즉시 보고하여야 한다. (별지 제12호서식)

제30조(건설공사의 과적방지) ① 시공자는 사토 및 순성토가 10,000㎥ 이상 발생하는 공사현장에서는 과적차량 발생을 방지하기 위하여 축중기를 설치하여야 하며, 축중기 설치 및 관리에 관한 사항은 「건설현장 축중기 설치지침」(국토해양부 훈령 제325호)과 「건설공사차량과적방지지침」(’06.2.23)에 따른다

② 감리원은 제1항에 따라 시공자가 설치한 축중기가 적절히 운영․관리되도록 확인하여야 한다

제31조(기성 및 준공검사) ① 감리원은 시공자와 함께 해당 공사의 기성 및 준공검사시 입회하여야 한다.

② 감리원은 기성 및 준공검사시 다음 사항을 준비하여 검사자가 확인하도록 하여야 한다

1. 기성부분내역 또는 준공도서

2. 시공 후 매몰부분에 대한 감리원의 검사기록 서류 및 시공 당시의 사진

3. 품질시험․검사 성과 총괄표

4. 기타 검사자가 요청하는 사항

제32조(예비준공검사) 검측감리원은 예비준공검사의 수행과 관련하여 검사자의 일원으로 참여하여야 한다

제33조(준공도면 등의 검토․확인) ① 감리원은 정산설계도서 등을 검토하고 시설 목적물이 발주청에 차질없이 인계될 수 있도록 하여야 한다. 감리원은 시공자로부터 가능한 준공일 45일 전까지 정산설계도서를 제출받아 이를 검토하여야 한다.

② 감리원은 시공자가 작성 제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성되었는지의 여부를 검토하여 검토의견서를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

제34조(현장문서 인계․인수) ① 감리원은 해당 공사와 관련한 다음 각 호의 감리기록서류를 포함하여 발주청에 인계할 문서의 목록을 공사감독관과 협의, 작성하여야 한다.

1. 준공 사진첩

2. 준공 도면

3. 품질시험․검사성과 총괄표

4. 기자재 구매서류

5. 시설물 인계․인수서

6. 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 서류

② 감리원은 공사감독관과 협의한 현장문서를 감리용역 준공후 14일 이내에 공사감독관에게 인계하고, 감리전문회사도 사본 1부를 보관한다.

③ 발주청은 제1항 및 제2항에 따라 제출받은 현장문서를 시설물이 존속하는 기간까지 보관하여야 한다

제35(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

부   칙〈2005년12월30일〉

제1조(시행일) 이 지침은 2006년 1월 1일부터 시행한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 지침은 2008년 4월 23일부터 시행한다.

부   칙 <2009년 8월 24일>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부   칙〈2009년  10월  6일〉

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(시행중인 건설공사에 관한 적용례) 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 의하여 건설공사가 시행중인 경우로서 새로이 진행되는 시행절차에 관하여는 개정규정에 따른다. 다만, 새로이 시행되는 절차가 종전의 완료된 시행절차와 연계되어 있어 개정규정을 적용할 수 없다고 발주청이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부   칙〈2010년 12월 30일〉

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(시행중인 건설공사에 관한 적용례) 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 의하여 건설공사가 시행중인 경우로서 새로이 진행되는 시행절차에 관하여는 개정규정에 따른다. 다만, 새로이 시행되는 절차가 종전의 완료된 시행절차와 연계되어 있어 개정규정을 적용할 수 없다고 발주청이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부록Ⅰ

공사시행 단계별 업무안내

【부록Ⅰ】

공사시행 단계별 업무안내

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청		감리원	시공자
					공사감독관
공사착공	·감리계약 체결	·P.Q기준 ·감리업무수행계획서, 감리원 배치계획서			작성 검토
	·용지측량, 기공승락, 지장물 이설 확인 용지보상등의 지원업무를 수행 ·감리업무 착수 ·업무연락처 등의 보고				주관	시행 시행
	·설계도서 등의 검토	·발주청에 보고				검토,보고	검토,보고
	·감리사무실 설치 및 설계도서 등의 관리	·사무실의 설치 ·설계도서 등의 관리	시행			시행	시행
	·착공신고서 ·공사표지판 등의 설치				검토 승인		작성 시행
	·측량기준점 및 각종 규준 시설	·측량기준점의 보호			이동시 승인	확인	시행
		·규준시설 설치			확인	확인	시행
	·확인측량	·확인측량 실시			입회,확인	입회,확인	시행
		·확인측량 결과의 처리	지시		검토,보고		작성
	·유관자 합동회의		요구		주관	지원	내용설명
	·하도급 관련사항				검토		요구
	·현장사무소, 공사용도로 작업장부지 등의 선정	·가시설물 설치계획표			승인		작성
	·현지여건 조사		승인		합동조사	합동조사	합동조사
	·인·허가 업무		주관		요구		요구
	·공사착수 회의		주관				주관
	·품질관리계획(품질시험계획)		승인		검토		주관

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청	감리원	시공자
				공사감독관
공사시공 (1)	·일반행정업무	·감리원에 대한 지도관리 ·감리기록관리 ·발주청에 정기 및 수시 보고사항 ·현장 정기교육 ·발주청의 자문요구 및 감리원의 의견제시	승인 접수 요구	주관 확인 보고 지시 검토	검토 작성	작성 주관
공사시공 (2)	·일반행정업무	·민원사항 ·발주청의 지시사항 전달 및 공사수행상 문제점 파악보고 ·필요시 기성검사 입회 ·현장대리인, 시공자 기술자 등의 교체 ·추가용지보상 업무 ·제3자 손해의 보상 ·시공자에 대한 지시 ·수명사항의 처리 ·공사 진행과정 사진 촬영 및 설명서 작성	요구 필요시 입회지시 요구 주관 주관 지시	조치 주관 입회 검토,보고 협조 검토 검토 주관	입회 보고	조치 시행 협조 주관 결과보고 이행 주관
	·품질관리	·품질관리계획 ·품질시험계획 ·품질시험의 요령 및 조치 ·시험·검사성과 처리 ·외부기관에 품질시험의뢰	주관 이행확인 승인 주관	이행확인 이행확인 입회확인 검토,확인 지시 입회확인	검토 검토 입회확인 검토,확인 입회확인	작성 시행 보고 주관
	·시공관리	·시공계획서 ·시공상세도 ·명일 작업실적 및 명일 작업계획서 ·시공확인 ·검측업무 ·매몰부분 검사 기록 ·현장 실정보고	요구 요구 승인	검토,확인 검토,확인 확인,지시 작성,확인 검토,보고	검토,확인 확인,작성 작성,확인	작성 작성 작성,협의 시행 요청 작성

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청	감리원	시공자
				공사감독관
공사시공 (3)	·시공관리	·암반선 ·특수공법 ·기술검토 의견서 ·주요기자재 공급원의 검토 승인 신청서 ·주요기자재의 검수,관리 ·지급자재의 검수,관리 ·지장물 및 기존 구조물의 철거 ·발주청에 현장 상황보고 ·공사감독관의 공사중지명령 등	협의 승인 검토,지시	확인 검토 작성 승인 확인 확인,보고 검토,확인 보고 지시,요구	확인 검토 검토 확인	요구 요구 작성 주관 요구 작성 시행
	·설계변경 및 계약금액의 조정	·경미한 설계변경 ·발주청의 지시에 의한 설계변경 ·시공자의 제안에 의한 설계변경 ·변경계약전 설계변경에 따라 기성고 및 지급자재의 지급 ·계약금액의 조정	지시 통보 승인 심사,승인	검토,지시 검토,보고 검토,보고 지시 작성,보고		작성 검토,작성 보고 작성 요구 작성
	·공정관리	·공정관리계획서 (실시공정표 포함) ·공사진도관리 (월간·주간 상세공정표) ·부진공정 만회대책 ·수정 공정계획 ·준공기한 연기원 ·공정현황 보고	승인	승인,보고 검토,확인 지시 지시,검토 보고 검토,승인 확인,보고 확인,보고	검토	작성 작성 작성 요구,작성 작성 보고

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청	감리원	시공자
				공사감독관
공사시공 (4)	·안전관리 ·환경관리	·안전관리 ·안전점검 ·안전교육 ·안전관리 결과 보고서 ·사고처리 ·환경관리 ·제보고 사항	주관	확인 지도,감독 지시,감독 검토,지시 지시,보고 지도,감독 보고	보고	시행 시행 시행 작성 조치 시행,보고 작성
기성부분 및 준공검사	·검사지침	·검사자의 임명 ·검사 ·불합격 공사에 대한 재시공명령 ·기성부분검사원 및 기성내역서 검토 ·감독조서의 작성 ·기성부분 검사 ·시설물 시운전 ·예비 준공검사 ·준공검사원 ·준공도면 등의 검토 ·공사현장의 사후관리 ·준공표지의 설치	임명 검사 지시, 재검사 검사 검사,지시	입회 확인 검토 작성 입회 검토,보고 입회 검토,확인 검토,확인 검토,확인 지시,확인	입회 검토 입회 입회 입회 검토 검토	조서작성 시행 작성 입회 작성 보완 작성 작성 시행 시행
인수인계	·시설물 인수․인계 ·준공 후 현장문서 인수․인계 ·유지관리 및 하자 보수	·시설물 인수․인계 계획수립 ·시설물 인수․인계 ·준공도서 등의 인수 ·시설물의 유지관리 지침서 등 ·하자보수에 대한 의견제시	시행 협의,인수 조사지시	검토,통보 검토 작성 검토,보고	입회 의견제시	작성 시행 자료제출

부록Ⅱ

□ 감리 보고 서식

[별지 제1호] ～ [별지 제23호]

□ 기타 서식

[별지 제24호] ～ [별지 제41호]

	유 의 사 항
이 지침서에 제시된 각종 서식은 일반적인 공사현장에 적용할 표준적인 서식으로서 해당 현장의 특수한 실정과 발주기관의 형편에 따라 변형하여 적용할 수 있음. 따라서 현장에 적용할 서식은 사전에 발주청과 협의ㆍ결정한 후 사용토록 하여야 함.

[별지 제1호서식]

공사계약번호 - 보고일련번호

○  ○  부  ○  ○ 청

----------------------------------------------------------

○○ 건 설 공 사

월 간 또는 분기별 감 리 보 고 서

20  년   월

○  ○  주 식 회 사

대표이사 ○ ○ ○

[별지 제2호서식]

(제 1 쪽)

목      차

구 분	제 목
제 1 장	공사추진 현황
1.1	공사계약 개요
1.2	공사 추진계획 및 실적
1.3	부진공정 만회대책
1.4	검측감리용역 계약개요
1.5	감리단 조직
1.6	감리원의 공사 중지 명령
제 2 장	감리원 업무일지
2.1	시공감리원 업무일지
2.2	보조감리원 업무일지
2.3	감리원 근무상황판
제 3 장	품질시험․검사현황
3.1	품질시험․검사현황
제 4 장	구조물별 콘크리트 타설현황
4.1	구조물별 콘크리트 타설 현황
4.2	콘크리트 타설 참여자(기능공 포함) 실명부
제 5 장	검측요청․결과 통보내용
5.1	검측요청서 및 검측결과통보
5.2	공사 참여자(기능공 포함) 실명부
5.3	검측체크리스트
제 6 장	주요자재 검사 및 수불내용
6.1	주요자재 검사 및 수불부

(제 2 쪽)

구 분	제 목
제 7 장	공사 설계변경 현황
7.1	공사 설계변경 현황(관련문서 포함)
7.2	현장 실정보고 현황(관련문서 포함)
7.3	기술 검토 사항
제 8 장	주요구조물의 단계별 시공현황
8.1	주요구조물 및 중점 관리대상 공종현황
8.2	주요구조물의 단계별 시공현황
제 9 장	콘크리트 구조물 균열관리 현황
9.1	콘크리트 구조물 균열관리 현황
제 10 장	공사사고 보고서
10.1	공사사고 보고서
제 11 장	그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용
11.1	신기술, 특수공법 사용실적
11.2	우수시공 및 실패시공 사례
11.3	하도급 현황과 시공자에 의한 불법 하도급 행위
11.4	자체 또는 외부기관 건설현장 점검결과 및 조치사항 등

[별지 제3호서식]

(제 1 쪽)

제1장  공사추진 현황

1.1 공사계약 개요

◦ 공 사 명 :

◦ 위    치 :

◦ 공사종류 :

◦ 사업개요 :

◦ 계약일자 :

◦ 준공 예정일자 :

◦ 사 업 비 :

(단위:백만원)

총사업비	도 급 액	관 급 액	보 상 비	설계비	감리비

◦ 낙찰률 :

◦ 시공회사 :

※ 공동도급일 경우 지분율 표기

◦ 입찰방법 :

---------------------------------------------------------

※ 작성요령

1. 공동도급일 경우 지분율 및 이행방식을 기재합니다.

2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.

(제 2 쪽)

1.2 공사 추진계획 및 실적(건축“예”)

(20   .   .   .현재, 단위:백만원)

구 분 공 종		단 위	전체계획		기 시 공 ( . . 까지)		금 회 (20 . . ～ . . )				공 정(%)
							계 획		시 공
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	전 체		금 회
											계획	실적	계획	실적
토공	땅 깍 기	m3
	흙 쌓 기	m3
	기 타	식
	소 계
배수공	배 수 관	m/개소
	암 거	m/개소
	기 타	식
	소 계
교량공	교	m/개소
	교	m/개소
	기 타	식
	소 계
터널공	터널	m/개소
	터널	m/개소
	기 타	식
	소 계
포장공	기 층	a
	표 층	a
	기 타	식
	소 계
부대공		식
합 계
사급자재비		식
순공사비
제경비		식
부가세
총 계
※작성요령 1. 전체 계획에서 공사량은 설계수량, 공사비는 계약금액을 기준으로 합니다. 2. 기시공은 전회 감리보고서 제출시점까지 시공한 실적을 기재합니다. 3. 금회는 전회 감리보고서 제출 후 금회 제출시점까지 시공한 실적을 기재합니다. 4. 공사량은 규격 등에 상관없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재 물량으로 기재하되 공사비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.

(제 3 쪽)

1.2 공사 추진계획 및 실적(건축“예”)

(20  .  .  . 현재, 단위:백만원)

공종	구 분 분 야	단위	전체계획		기 시 공 ( . . 까지)		금 회 (20 . . ～ . .)				공 정(%)
							계 획		시 공
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	전 체		금 회
											계획	실적	계획	실적
토목공사	토공사	㎥
	가시설공사	식
	지하 연속 벽공사	식
	부대공사	식
	운 반 비	식
	안전계측	식
	부대토목	식
	소 계	식
건축공사	가설공사	식
	철근CON'C 공사	㎡
	조적공사	천매
	방수공사	식
	타일공사	㎡
	석공사	식
	목공사	식
	금속공사	식
	미장공사	㎡
	창호공사	식
	유리공사	식
	도장공사	식
	수장공사	식
	지붕및홈통공사	식
	잡공사	식
	골재및운반비	식
	부대공사	식
	철거및폐기물처리	식
	공통가설	개월
	조경공사	식
	소 계	식
기계설비공사	장비설치공사	식
	기계실배관사	식
	옥외배관공사	식
	공조닥트설치공사	식
	소화설비공사	식
	자동제어 설치공사	식
	정화조및폐수 설비공사	식
	기타공사	식
	소 계	식

(제 4 쪽)

공종	구분 분야	단위	전체계획		기 시 공 ( . . 까지)		금 회 (20 . . ～ . .)				공 정(%)
							계 획		시 공
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	전 체		금 회
											계획	실적	계획	실적
전기공사	수․변전 설비공사	식
	전력간선 설비공사	식
	동력 설비공사	식
	전등 설비공사	식
	전열 설비공사	식
	피뢰침및접지공사	식
	전력CABLE TRAY공사	식
	전력및조명제어공사	식
	SNOW MELTING공사	식
	자동화재 탐지 설비공사	식
	무선통신보조및중계설비	식
	정화조 설비 공사	식
	가설공사	식
	소 계	식
통신공사	통합배선 설비공사	식
	CATV 설비공사	식
	CCTV 설비공사	식
	상호식 인터폰 설비공사	식
	주차 관제공사	식
	NURSE CALL설비공사	식
	전기시계 및 투약순번 안내공사	식
	방송 설비공사	식
	가설공사	식
	소 계	식
합 계
순 공사비		식
사급자재비		식
T. A. B		식
제경비		식
공급가액		식
부가세		%
총 계		식
※작성요령 1. 전체 계획에서 공사량은 설계수량, 공사비는 계약금액을 기준으로 합니다. 2. 기시공은 전회 감리보고서 제출시점까지 시공한 실적을 기재합니다. 3. 금회는 전회 감리보고서 제출 후 금회 제출시점까지 시공한 실적을 기재합니다. 4. 공사량은 규격 등에 상관 없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재 물량으로 기재하되 공사비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.

(제 5 쪽)

1.3 부진공정 만회대책(“예)

ㅇ 공사명 :

ㅇ 공정현황(20  .  .  현재)

구분	계획	실적	대비	비고
공정률(%)

ㅇ 부진사유

-

ㅇ 만회대책

-

1.4 검측감리용역 계약개요

◦계 약 일 자 ◦준공 예정일자 ◦계 약 금 액 ◦감 리 회 사 ◦낙 찰 률 ◦입 찰 방 법	: : : : : :

(제 6 쪽)

1.5 감리단 조직(‘예)

[ 상주 감리원 ]

								담 당					총 괄
								(등 급)					(성 명)
담당	공무관리			담당	공사관리				담당			공사관리				담당			품질관리			담당		안전관리
(등급)	(성 명)			(등급)	(성 명)				(등급)			(성 명)				(등급)			(성 명)			(등급)		(성 명)

〔 기술지원 감리원 ]

구 분	성 명	기술자격 종목
“예” 감리사(고급)
〃
〃
〃
〃

---------------------------------------------------------

※ 작성요령

감리원 등급은 과업지시서 등 계약문서에 기록된 등급을 기재(실제 “수석감리사(특급)”라도 “감리사(고급)”를 배치하는 것으로 계약된 경우는 “감리사(고급)”로 기재)합니다.

[별지 제4호서식]

(제 1 쪽)

제2장 감리원 업무일지

2.1 검측감리원 업무일지

년 월 일( 요일), 누계공정 %
검측감리원 업무일지					날씨 : (기온 ℃)
공사명 :
주요작업상황	공 종	단위	설계량	금 일			누계 작업량	공정(%)	특이사항
				작업위치		작업량
감리원별업무수행내용	성 명	서 명	주 요 업 무 수 행 내 용 (상세내용은 개인별 감리업무일지에 작성)						공사감독관 지시사항
	(보조감리원1)
	(보조감리원2)

(제 2 쪽)

감리원별업무수행내용	(보조감리원3)
	(보조감리원4)
	(보조감리원5)
관련문서	업무 분류	문서 분류	공종 구분	구조 물명	위치	제 목 (내용요약)
특 이 사 항
※작성요령 1. 검측감리원 본인의 업무내용을 6하 원칙에 의거 기록함은 물론 보조감리원의 감리업무일지를 보고 그 내용을 요약정리함과 동시에 공사추진내용, 검측결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 기록하고 모든 감리원에게 공람 서명토록 하여 감리원 모두가 현장내용을 파악할 수 있도록 작성한다. 2. 주요작업상황은 공사추진계획에 따라 당일 작업을 수행하였거나 그와 관련된 공종에 대하여 업무수행내용을 상세히 기록하여 작성한다.

(제 3 쪽)

2.2 보조 감리원 업무일지

〈“갑”지〉

년 월 일 ( 요일)					작 성 자
보조 감리원 업무일지					직 책
					성 명
					서 명
공사명 :		확인자 : 공사감독관		(인)
시간대별	업 무 내 용 (6하 원칙에 의거)

(제 4 쪽)

〈“을”지〉

시간대별	업 무 내 용 (6하원칙에 의거)
※작성요령 1. 보조감리원 업무일지는 갑지와 을지로 구분하고 업무내용이 많아 갑지에 기재가 원활하지 못할 경우 을지에 기재합니다. 2. 감리원은 업무수행과 관련하여 그 내용을 메모하여 이를 업무종료 전에 6하 원칙에 따라 업무일지를 기록하고 공사감독관의 확인을 받아야 합니다. 다만, 업무일지 작성이후에 발생된 업무나 진행상황의 파악이 어려운 경우에는 다음 날 확인을 받은 후 처리하되 업무일지에 누락되지 않도록 기록하여야 합니다. 3. 감리원의 업무일지는 매일매일 작성하는 것을 원칙으로 하고 각 보조감리 원의 업무일지 작성지연으로 인한 공사감독관의 공사감독일지 작성에 지장을 초래하지 않도록 성실히 작성하여야 합니다. 4. 감리원은 검측업무 수행사항에 대한 검측부위, 검측시간, 검측내용, 검측결과 등을 상세하게 기록하고 이에 대한 관련 문서번호, 구두로 시정명령한 사항 등을 포함한 지적사항과 조치사항 등을 상세히 기재합니다. 5. 감리원은 콘크리트 타설부위, 콘크리트규격, 타설량 등을 기재하고 시공자의 콘크리트 타설에 대한 검측요청이 있는 경우 해당 검측요청서의 문서번호 등을 기재합니다. 6. 감리원은 설계도서 검토결과를 도면명칭, 도면번호 등 상세히 기재합니다. 7. 감리원은 당일 처리한 문서번호, 검토내용 및 검토결과와 공사감독관에게 보고한 사항 및 지시받은 사항을 기록한다. 8. 감리원이 현장점검시 동행자 소속, 직책, 성명 등과 점검내용, 위치, 특정부위, 점검결과 등을 기록하고 현장점검 중 지적된 사항과 시공자에게 지시한 내용 등을 기재합니다. 9. 감리원은 공사와 관련하여 현장의 긴급상황, 조치사항, 도면검토, 구두협의 및 지시한 사항의 경우 상대방의 소속, 직책, 성명 등을 기록하고, 구두지시 및 유선통화 내용은 감리원들의 업무수행 근거자료이므로 상세히 기재합니다. 10. 감리원이 현장을 이탈하는 출장의 경우 시간, 목적지, 목적 등을 기록하고 업무협의 결과, 관련 문서번호 또는 명칭을 기록합니다. 다만, 현장 이탈 후 당일 복귀할 경우 당일 감리업무일지에 기록하고, 다음날 복귀하는 경우에는 다음날 공사감독관에게 보고한 후 기재합니다.

[별지 제4호의2서식]

2.3 감리원 근무상황판

년   월  일(   요일)

성명	시 간	용 무	행선지	비고
○○감리원 ○ ○ ○	09:00 ~ 12:00	발주청 업무협의	000 청 (연락처/전화번호)
○○감리원 ○ ○ ○	10:00~ 15:00	레미콘 배합설계	00면 00리 00레미콘 (레미콘업체/전화번호)
기술지원감리원 ○ ○ ○	09:00~ 15:00	정기점검	측점 0 + 00 (연락처/전화번호)
※작성요령 1. 두꺼운 종이나 합판 등으로 상황판을 제작하며, 표지에 아스테이지 등을 씌워 매일 기록 가능하도록 한다. 2. 규격은 가로 80㎝, 세로 100㎝에 종으로 작성하며, 감리단 사무실의 출입구 부근에 부착한다. 3. 근무상황판에는 상주감리원 전원의 근무상황을 모두 기록하여야 하며, 회의, 교육 등으로 현장을 이탈하는 경우에도 반드시 기재한다. 4. 기술지원감리원도 현장에 출장을 나온 경우에는 근무상황에 기재한다.

[별지 제5호서식]

제 3 장 품질시험․검사현황

3.1 품질시험․검사현황

공사명 :

일련 번호	년 월 일	시험․검사구분	재료	시험․검사항목	시험 기준	시험 결과	시험 결과 판정	시험․검사자		감리원 확인		비고
								성 명	서 명	성 명	서 명
※작성요령 1. 건설 자재별로 기재(콘크리트 타설은 별지 제6호서식으로 작성)합니다 2. 시험성과표는 별도 기재합니다. 3. 비고란에는 시험결과 불합격 되었을 경우 조치내용 등을 기재합니다.

[별지 제6호서식]

(제 1 쪽)

제4장 구조물별 콘크리트 타설현황

4.1 구조물별 콘크리트 타설 현황

구조 물명	타설 일자	타설 부위	설계량 (㎥)	타설량 (㎥)	콘크리트 배합종류	납품 회사	타설 방법	타설 시간	타설시 온 도 (℃)	시 험 결 과				시 험 자
										슬럼프 (㎝)	공기량 (%)	염분량 (㎏/㎥)	28일 압축 강도 (MPa)	시공사 직원		감리원
														성명	서명	성명	서명

※ 작성요령

1. 슬럼프, 공기량과 28일강도 시험자가 다를 경우 슬럼프, 공기량 시험자는 상단에, 28일강도 시험자는 하단에 성명과 서명

2. 직접타설 : Mixer Truck으로부터 직접 받아 타설.   3. Pump : Pump Car로 타설,    4. 콘크리트 배합 사례

	․	25-21-80을 A1으로 할 경우
		25-21-120는 A2
		25-21-150는 A3 등으로 기재합니다.

	․	19-24-80을 B1으로 할 경우
		19-24-120는 B2
		19-24-150는 B3 등으로 기재합니다.

(제 2 쪽)

4.2 콘크리트 타설 참여자(기능공 포함) 실명부

공사명 :

타설일	타설위치	소속	직위	성명	주민등록번호	공사한 내용	서 명
※작성요령 공사한 내용은 공사관리, 작업총괄, 레미콘 차량관리, 펌프카 노즐담당, 콘크리트 타설, 콘크리트 다짐, 거푸집 및 동바리 변형 감시, 콘크리트 마무리면 정리, 양생재 포설 등으로 구분하여 기재합니다.

[별지 제7호서식]

(제 1 쪽)

제 5 장 검측요청․결과 통보내용

5.1 검측요청서 및 검측결과통보

검 측 요 청 서

번호 :                                               20  .   .   .

받음 : ○○공사 책임감리원  ○○○

다음과 같은 세부공종에 대하여 검측요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

위 치 및 공 종
검 측 부 위
검 측 요 구 일 시
검 측 사 항

붙임 : 시공자의 검측 체크리스트, 시험성과, 시공자의 야장 및 도면, 공사 참여자(기능공 포함) 실명부

시공자     점 검 직 원          (인)

현장대리인           (인)

.......................................................................................................................................

검 측 결 과  통 보

번호 :                                              20  .   .   .

받음 : ○○공사 현장대리인  ○○○

문서번호 ○○로 검측요청 한 건에 대하여 20  .   .     . 검측한 결과를 다음과 같이 통보합니다.

1. 검측결과

2. 지시사항

붙임 : 감리원의 검측 체크리스트

검측감리원            (인)

※ 작성요령

1. 재검측시에는 붉은 글씨로 “(재)”를 우측 상단에 작성합니다.

2. 시공자가 재검측 요청할 때에는 잘못 시공한 기능공의 성명을 받아 그 명단을 첨부하여야 합니다.

3. 2부 작성하여 시공자, 감리원 각 1부를 보관하여야 합니다.

(제 2 쪽)

5.2 공사 참여자(기능공 포함) 실명부

공사명 :

작업일	작업위치 및 공종	소 속	직 위	성 명	주민등록번호	공사한 내용	서 명
※작성요령 1. 직위란에는 공사관리, 형틀 또는 철근 작업반장, 목수, 철근공, 콘크리트공, 특별인부, 보통인부 등으로 구분하여 기재합니다. 2. 공사한 내용란에 - 형틀의 경우에는 공사관리, 작업총괄, 자재운반, 거푸집 및 동바리 제작, 거푸집 및 동바리 조립, 박리제 도포 등으로 구분 기재하고 - 철근의 경우에는 가공, 현장 운반, 조립, 청소 등으로 구분하여 기재하며 - 기타 공종도 무슨 일을 하였는지 구분하여 기재합니다.

(제 3 쪽)

5.3 검측 체크리스트

공종 CODE №		위치 및 부위
공종(세부공종)		공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격

시공자 점검일자	년 월 일	점 검 직 원	(인)
공사감독관 검측일자	년 월 일	검측감리원	(인)

※작성요령

1. 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는 검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 기재합니다.

2. 매몰부분은 사진을 첨부한다

3. 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 기재합니다.

[별지 제8호서식]

제6장 주요자재 검사 및 수불부

6.1 주요자재 검사 및 수불부

품명 :

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량	불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회 누계	불합격량	사유
※작성요령 1. 상단은 반입검수자가 하단은 출고검수자가 기재합니다. 2. 현장 반입 후 작업장 반출 시 까지는 감리원의 감독하에 관리합니다. (매 출고시마다 감리원이 확인하여 반출량 및 잔량을 확인하여야 합니다.)

[별지 제9호서식]

제7장 공사 설계변경 현황

7.1 공사 설계변경 현황

(1) 변경회수 :

(2) 변경일자 :

(3) 주요변경내용

공 종	수 량			공 사 비(백만원)			변 경 사 유	비 고
	단위	당초	변경	당초	변경	증ㆍ감
계

7.2 현장 실정보고 현황

번 호	보고일 (문서번호)	승인일 (문서번호)	제목	내용	비 고
계

7.3 기술검토 사항

번 호	보고일자 (문서번호)	제 목	주요내용	비 고

[별지 제10호서식]

(제 1 쪽)

제8장 주요구조물의 단계별 시공현황

8.1 주요구조물 및 중점 관리대상 공종현황(토목“예”)

8.1.1 주요구조물

구 조 물 명	위 치	구조물 개요 및 규모	기초 및 상부 가설공법 등	특이사항
“예” - oo교 ․ 강교(ST Box) - oo터널	STA : STA :
※작성요령 주요구조물은 층고가 높거나 경간이 길어 구조적인 부담이 큰 부분이나 신기술, 특수공법이 적용되는 주요구조부를 기재합니다.

8.1.2 중점 관리대상 공종

공 종	위 치	공종개요 및 규모	공 법	중점관리 필 요 성	특이사항
“예” -대절토 -대성토 -연약지반 -용수분출	STA : STA : STA : STA :
※작성요령 중점관리대상은 시공과정에서 계측 등 지속적인 관리가 필요한 부분을 기재합니다.

(제 2 쪽)

8.1 주요구조물 및 중점 관리대상 공종현황(건축 “예”)

8.1.1 주요구조물

구조물명	위 치	구조물 개요 및 규모	공 법	특이사항
철골 트러스	옥상층 바 닥	◦ 면적 : ◦ 규격 : ◦ 경간 :
기 초 말 뚝	지하3층	◦ 규격 : ◦ 본수 :
※작성요령 주요구조물은 층고가 높거나 경간이 길어 구조적인 부담이 큰 부분이나 신기술, 특수공법이 적용되는 주요 구조부를 기재합니다.

8.1.2 중점 관리대상 공종

공 종	위 치	공종개요및 규 모	공 법	중점관리 필 요 성	특이사항
흙막이 공사
가시설 공사
※작성요령 중점 관리대상은 시공과정에서 계측 등 지속적인 관리가 필요한 부분을 기재합니다.

(제 3 쪽)

8.2 주요구조물 단계별 시공현황(토목“예”)

(1) 교량 등 주요 콘크리트 구조물

◦ 구조물명 : ○○교 P1 또는 A1 또는 PC빔, 슬라브 등

◦ 시공기간 :

◦ 터파기 완료일자 :

◦ 암판정 일자 :

◦ 버림CON`C 타설일자 :

(시공/설계)

구 분		높이 (m)	철근조립	거푸집 조 립	CON`C 타설	양 생	거푸집 해 체	자 재
								철근 (ton)	CON`C (m3)
“예” 기 초
교각 또는 교대 ( m)	1 Lot
	2 Lot
	3 Lot
	4 Lot
	5 Lot
COPING
총 계
※작성요령 1. 필요시 단면도 및 정면도, 좌표 등을 첨부합니다. 2. 철근조립에서 거푸집 해체까지는 최초일부터 최종일까지 소요된 작업기간을 기재합니다.

(제 2 쪽)

(제 4 쪽)

(2) 터  널

◦ 구조물명 :

◦ 공    법 :

◦ 시공기간 :

구 분	연장 (m)	굴착	암반면 정 리	Rock bolt	Shot -crete	Steel rib	계측관리			부직포 및 방 수 제포설	철근 조립	거푸집 조 립	CON`C 타설	양생	거푸집 해 체	자 재
							갱 내 관 찰	내 공 변 위	천 단 침 하							철근 (ton)	CON`C (m3)
“예“ 1 Block
2 Block
3 Block
4 Block
총 계

(제 5 쪽)

8.2 주요구조물 단계별 시공현황(건축 “예”)

(1) 건축물

◦ 구조물명 :

◦ 시공기간 :

◦ 터파기 완료일 :

◦ 암 판정일 :

◦ 버림CON`C 타설일 :

(시공/설계)

구 분		층 고 (m)	철근조립	거푸집 조 립	CON`C 타설	양 생	거푸집 해 체	자 재
								철근 (ton)	CON`C (m3)
기 초
지하층	3층
	2층
	1층
지상층	1층
	2층
	3층
	4층
	5층
	6층
총 계
※작성요령 1. 필요시 단면도 및 정면도, 좌표 등을 첨부합니다. 2. 철근조립에서 거푸집 해체까지는 최초일부터 최종일까지 소요된 작업기간을 기재합니다.

〔별지 제11호서식〕

제9장 콘크리트 구조물 균열관리 현황

균 열 관 리 대 장
구조물명 및 규 모						위 치			원 인
최초발견일						관리방법			보수현황
단 면 도 및 전개도

발생부위 NO	Con'c 타설일	타설시 온 도	1차 조사			2차 조사			3차 조사			4차 조사			조사자	확인자
			일자	균열폭	균열길이	일 자	균열폭	균열길이	일 자	균열폭	균열길이	일 자	균열폭	균열길이

※작성요령

1. 보수현황은 보수기간, 보수방법, 보수회사, 보수금액 등이 포함되게 작성합니다.

2. 단면도, 전개도는 필요시별도 첨부합니다.

〔별지 제12호서식〕

제10장 공사사고 보고서

공사사고 보고서

───────────────────────────────

수신 :                       분 류 기 호  :

참조 :                       제출년월일 :

발       신 :                     (서명)

공 사 명
계 약 금 액
시 공 자
착 공 년 월 일
준공예정 년월일
사고발생 년월일
최 근 공 정
피 해 개 요
복 구 대 책
첨 부 서 류	피해 광경사진, 피해 내역서

[별지 제13호서식]

공사계약번호 - 보고번호

○  ○  부  ○  ○ 청

----------------------------------------------------------

○○ 건 설 공 사

최 종  감 리 보 고 서

20  .  .

○  ○  주 식 회 사

대표이사 ○ ○ ○

[별지 제14호서식]

(제 1 쪽)

목       차

구 분	제 목
제 1 장	건설공사 및 감리용역개요
1.1	사업목적
1.2	건설공사 개요
1.3	감리용역 개요
1.4	설계용역 개요
1.5	위치도
제 2 장	공사추진내용 실적
2.1	기성 및 준공검사 현황
2.2	공종 및 연도별 추진실적
2.3	건설공사 설계변경 현황
2.4	실정보고 처리현황
2.5	발주청 지시사항 처리현황
2.6	주요인력 및 장비 투입현황
2.7	하도급 현황
2.8	감리용역 설계변경 현황....
2.9	감리원 투입현황
제 3 장	검측내용 실적종합
3.1	검측관리실적
3.2	검측관리 종합분석
제 4 장	품질시험․검사총괄
4.1	품질관리자
4.2	시험장비 사용현황
4.3	시험실 배치 평면도
4.4	품질시험․검사성과 총괄표
4.5	품질관리 종합분석

(제 2 쪽)

구 분	제 목
제 5 장	주요자재 관리실적 총괄
5.1	자재공급원 승인현황
5.2	주요자재 투입현황
5.3	주요자재관리 종합분석
제 6 장	안전관리 실적종합
6.1	안전관리 조직도
6.2	안전보건 교육현황
6.3	안전점검 현황
6.4	산업안전보건관리비 사용실적
6.5	안전관리비 사용실적
6.6	안전관리 종합분석
제 7 장	분야별 기술검토 실적종합
7.1	분야별 기술검토 현황
7.2	주요기술검토내용
제 8 장	우수시공 및 실패시공사례
8.1	우수시공사례 현황
8.2	우수시공사례
8.3	실패시공사례 현황
8.4	실패시공사례
제 9 장	종합분석
제 10 장	발주청이 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

[별지 제15호서식]

(제 1 쪽)

제1장 건설공사 및 감리용역 개요

1.1 사업목적

ㅇ

1.2 건설공사개요

◦ 공 사 명 :

◦ 위    치 :

◦ 사업개요

◦ 계약일자 :

◦ 공사종류 :

◦ 공사기간 :

◦ 사 업 비

(단위:백만원)

총사업비	도 급 액	관 급 액	보 상 비	설계비	감리비

◦ 낙찰률 :

◦ 시공회사 :

※ 공동도급일 경우 지분율 표기

◦ 입찰방법 :

ㅇ 건설현장 조직(“예”)

															현장대리인
																												안전관리자
공무팀장									공사팀장										공사팀장										품질관리자
공 무									공 사										공 사										시험보조

(제 2 쪽)

1.3 검측감리용역개요

ㅇ계 약 일 자 ㅇ용 역 기 간 ㅇ준 공 금 액 ㅇ감 리 회 사 ㅇ낙 찰 률 ㅇ입 찰 방 법	: : : : : :

ㅇ감리단 조직(“예”)

[ 상주 감리원 ]

								담 당				총 괄
								(등 급)				(성 명)
담당	공무관리			담당	공사관리				담당		공사관리				담당			품질관리			담당		안전관리
(등급)	(성 명)			(등급)	(성 명)				(등급)		(성 명)				(등급)			(성 명)			(등급)		(성 명)

〔 기술지원 감리원 ]

구 분	성 명	기술자격 종목
“예” 감리사(고급)
〃

---------------------------------------------------------

※ 작성요령

1. 감리단 조직은 준공 기준으로 작성합니다.

2. 감리원 등급은 과업지시서 등 계약문서에 기록된 등급을 기재(실제 “수석감리사(특급)”라도 “감리사(고급)”를 배치하는 것으로 계약된 경우는 “감리사(고급)”로 기재)합니다.

1.4 설계용역개요

ㅇ계 약 일 자 ㅇ용 역 기 간 ㅇ준 공 금 액 ㅇ설 계 회 사 ㅇ낙 찰 률 ㅇ입 찰 방 법	: : : : : :

(제 3 쪽)

1.4 위치도(1/25,000)

[별지 제16호서식]

(제 1 쪽)

제2장 공사추진내용 실적

2.1 기성 및 준공검사 현황

연도 (차수)	구 분	기성 및 준공금액	검사일	검사자	비고

(제 2 쪽)

2. 2 공종 및 연도별 추진실적(토목“예”)

(단위 : 백만원)

구 분 공 종		단 위	전 체		20 년도(1차)		20 년도(2차)		20 년도(3차)		20 년도(4차)
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비
토공	땅 깍 기	m3
	흙 쌓 기	m3
	기 타	식
	소 계
배수공	배 수 관	m/개소
	암 거	m/개소
	기 타	식
	소 계
교량공	교	m/개소
	교	m/개소
	기 타	식
	소 계
터널공	터널	m/개소
	터널	m/개소
	기 타	식
	소 계
포장공	기 층	a
	표 층	a
	기 타	식
	소 계
부대공		식
합 계
사급자재비		식
순공사비
제경비		식
부가세
총 계
※작성요령 1. 전체 계획에서 공사량은 설계수량, 공사비는 계약금액을 기준으로 합니다. 2. 공사량은 규격 등에 상관없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재 물량으로 기재하되 공사비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.

(제 3 쪽)

2.2 공종 및 연도별 추진실적(건축“예”)

(단위:백만원)

공종	구 분 분 야	단위	전 체		20 년도(1차)		20 년도(2차)		20 년도(3차)		20 년도(4차)
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비
토목공사	토공사	㎥
	가시설공사	식
	지하 연속 벽공사	식
	부대공사	식
	운 반 비	식
	안전계측	식
	부대토목	식
	소 계	식
건축공사	가설공사	식
	철근CON'C 공사	㎡
	조적공사	천매
	방수공사	식
	타일공사	㎡
	석공사	식
	목공사	식
	금속공사	식
	미장공사	㎡
	창호공사	식
	유리공사	식
	도장공사	식
	수장공사	식
	지붕및홈통공사	식
	잡공사	식
	골재및운반비	식
	부대공사	식
	철거및폐기물처리	식
	공통가설	개월
	조경공사	식
	소 계	식
기계설비공사	장비설치공사	식
	기계실배관사	식
	옥외배관공사	식
	공조닥트설치공사	식
	소화설비공사	식
	자동제어 설치공사	식
	정화조및폐수 설비공사	식
	기타공사	식
	소 계	식

(제 4 쪽)

공종	구분 분야	단위	전 체		20 년도(1차)		20 년도(2차)		20 년도(3차)		20 년도(4차)
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비
전기공사	수․변전 설비공사	식
	전력간선 설비공사	식
	동력 설비공사	식
	전등 설비공사	식
	전열 설비공사	식
	피뢰침및접지공사	식
	전력CABLE TRAY공사	식
	전력및조명제어공사	식
	SNOW MELTING공사	식
	자동화재 탐지 설비공사	식
	무선통신보조및중계설비	식
	정화조 설비 공사	식
	가설공사	식
	소 계	식
통신공사	통합배선 설비공사	식
	CATV 설비공사	식
	CCTV 설비공사	식
	상호식 인터폰 설비공사	식
	주차 관제공사	식
	NURSE CALL설비공사	식
	전기시계 및 투약순번 안내공사	식
	방송 설비공사	식
	가설공사	식
	소 계	식
합 계
순 공사비		식
사급자재비		식
T. A. B		식
제경비		식
공급가액		식
부가세		%
총 계		식
※작성요령 1. 전체 계획에서 공사량은 설계수량, 공사비는 계약금액을 기준으로 합니다. 2. 공사량은 규격 등에 상관없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재 물량으로 기재하되 공사비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.

(제 5 쪽)

2.3 건설공사 설계변경현황

단위 : 천원

변경 회수별	계약일자	총공사비	도급액	관급 자재비	기타	설계변경내용
당 초

(제 6 쪽)

2.4 실정보고 처리현황

번 호	보고일 (문서번호)	승인일 (문서번호)	제목	내용

(제 7 쪽)

2.5 발주청 지시사항 처리현황

번 호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용

(제 8 쪽)

2.6 주요인력 및 장비투입 현황

인 원 투 입 현 황			장 비 투 입 현 황
직종	투입인원	비고	장비명	규격	투입대수	비고

(제 9 쪽)

2. 7 하도급 현황

공 종	협력업체명				하도급 금액 (천원)	하도급률(%)	공사기간	현장 대리인
	상 호	대표자	업종및 면허	전화번호

(제 10 쪽)

2. 8 감리용역 설계변경 현황

구 분	계약일자	계약금액	설계변경내용	비 고
당 초

(제 11 쪽)

2. 9 감리원 투입현황

구분	성명	담당업무	기술자격	참여등급	참여기간	비고
상주감리원
기술지원감리원

[별지 제17호서식]

(제 1 쪽)

제3장 검측내용 실적종합

4.1 검측관리실적(토목 “예”)

공 종	검 측 결 과(건수)			비 고
	합격	불합격	재검측
계
토 공
배 수 공
교 량 공
포 장 공
부 대 공
자재검수

(제 2 쪽)

4.1 검측관리실적(건축 “예”)

공 종	검 측 결 과(건수)			비 고
	합격	불합격	재검측
계
토목공사
건축공사
기계설비공사
전기공사
통신공사
자재검수

4.2 검측관리 종합분석

ㅇ

〔별지 제18호서식]

(제 1 쪽)

제4장 품질시험․검사실적 종합

4.1 품질관리자

성 명	등 급	품질관리업무 수행기간	비 고
			* 기술자격 또는 학·경력사항 기재

4.2 시험장비 사용현황

장비명	규 격	단 위	수 량	비 고

(제 2 쪽)

4.3 시험실 배치평면도

4.4 품질시험․검사성과 총괄표

공 종	시험․검사종류 (재 료)	시험․검사회수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험

4.5 품질관리 종합분석

ㅇ

[별지 제19호서식]

(제 1 쪽)

제5장 주요자재 관리실적 종합

5.1 자재공급원 승인현황

품 명	규 격	공급원	승인일	비고

(제 2 쪽)

5.2 주요자재 투입현황

5.2.1 관급자재 투입현황

품 명	규 격	단 위	설계량	반입량	사용량	잔 량

5.2.2 사급자재 투입현황

품 명	규 격	단 위	설계량	반입량	사용량	잔 량

5.3 주요자재관리 종합분석

ㅇ

[별지 제20호서식]

(제 1 쪽)

제6장 안전관리 실적 종합

6.1 안전관리 조직도(“예”)

							안전보건총괄책임자 (안전총괄책임자)
							현장소장
							연락처
안 전 관 리 자																	협 의 체
○ ○ ○																	(수급인 및 하수급인 사업주 전원)
관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리책임자)							관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리책임자)
(예)토목					○○							○○					○○
연락처					연락처							연락처					연락처
관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)							관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)
담당자					담당자							담당자					담당자
연락처					연락처							연락처					연락처

6.2 안전보건교육 현황

구 분	실시회수	교육인원		비고
		직원	근로직
계
수시교육
정기교육
특별교육
외부교육

6.3 안전점검 현황

구 분	실적(회)	비 고
계
자체안전점검
정기안전점검
정밀안전점검
외부안전점검

(제 2 쪽)

6.4 산업안전보건관리비 사용실적

산업안전보건관리비 사용실적총괄
	건설업체명		공 사 명
	소 재 지		대 표 자
	공사금액	원	공사기간	～
	발 주 자		누계공정률	%
	계 상 된 안전관리비	원
	사 용 금 액
	항 목		누계사용금액
	계
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등
	2. 안전시설비 등
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
	4. 안전진단비 등
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등
	6. 근로자 건강관리비 등
	7. 건설재해예방 기술지도비
	8. 본사사용비
건설업산업안전보건관리비계상및사용기준 제10조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다. 년 월 일 작 성 자 직책 성명 (서명 또는 인)

(제 3 쪽)

6.5 안전관리비 사용실적

6.5.1 총괄

안전관리비 사용실적
1. 개 요
명 칭 (상 호)			금액내역	(1) 재 료 비
대 표 자
				(2) 관급자재비
공 사 명
현 장 명
				(3) 노 무 비
발 주 자
				(4) 부대시설비
공 사 기 간
공사의종류	1. 1종시설물 2. 2종시설물 3. 10m 이상 굴착공사 4. 폭발물을 사용하는 건설공사 5. 기타 건설공사
				계
				안전관리비
2. 항목별 실행계획
항 목					금 액
가. 안전관리계획서 작성비
나. 공사현장의 안전점검비
다. 공사장 주변 안전관리 비용
라. 통행안전 및 교통소통 대책 비용
마. 기타
총 계

(제 4 쪽)

6.5.2 세부사용실적

(1) 안전관리계획서 작성비

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계
안전관리 계획서 작성
안전점검 공정표 작성
안전관리 계획서 확인

(2) 공사현장의 안전점검비

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계
공사현장의 안전점검 비용
진동․소음․분진 등의 환경측정 비용
기계․기구의 완성검사 비용
기계․기구의 정기검사 비용
기타

(제 5 쪽)

(3) 공사장 주변 안전관리 비용

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계
지하매설물 방호
인접구조물 보호
민원대책 비용
기타

(4) 통행안전 및 교통소통 대책 비용

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계
통행 안전시설 설치
통행 안전시설 유지관리
교통소통 및 교통사고 예방대책 비용
기타

[별지 제21호서식]

(제 1 쪽)

제7장 분야별 기술검토 실적종합

7.1 분야별 기술검토 현황

번 호	보고일자 (문서번호)	제 목	주요내용	비 고

(제 2 쪽)

7.2 주요기술검토내용(“예”)

검토의견서
기술검토건명		보고일자 (문서번호)
검토기간		검토자
1. 검토목적
2. 검토내용
3. 결 과

〔별지 제22호서식]

(제 1 쪽)

제8장 우수시공 및 실패시공 사례

8.1 우수시공사례 현황

번 호	제 목	주요 내용	비 고

(제 2 쪽)

8.2 우수시공 사례(“예”)

우수시공 사례
제 목
시공기간
1. 현 황
2. 문제점
3. 개선내용
4. 효 과

(제 3 쪽)

8.3 실패시공사례 현황

번 호	제 목	주요 내용	비 고

(제 4 쪽)

8.4 실패시공 사례(“예”)

실패시공 사례
제 목
시공기간
1. 시공내용
2. 실패내용
3. 교 훈

[별지 제23호서식]

제9장 종합분석(“예”)

1. 서론
2. 공종별 분석
공 종	분석내용	비고
3. 공사추진중 문제점 및 대책, 개선사항
문제점	대책	개선사항
4. 특기사항
5. 맺음말

[별지 제24호서식] 문서접수 및 발송대장
연번	접수일	발신 수신	시행일	분류기호 문서번호	제 목	첨 부 물		처 리 담 당	발송방법		배 부
						명 칭	수 량		우편	인편사송	인계인	수령인

[별지 제25호서식]

민  원  처  리  부 ( 전화 및 상담 )

공 사 명 :  ○ ○ 건설공사

월 일	민 원 인	민 원 내 용	처리계획 및 조치내용	비 고
	( 주 소 ) ( 성 명 ) ( 연락처 ) ( 주민등록번호)	( 위 치 ) ( 민원내용)

※작성요령 : 검측감리원이 처리 불가능한 사항은 발주청에 서면 보고합니다.

[별지 제26호서식]

품 질 시 험 계 획

공사명 :                   작  성  일 :        년       월       일

시공자 :                   현장대리인 :             (인 또는 서명)

1. 시험계획회수

공 종	시험종목	시험계획물량	시험빈도	계획시험회수	비 고

2. 시험시설 및 인력배치계획

가. 시험시설

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고

나. 시험인력

등 급	품질관리업무 수행기간	성 명	비 고
			* 기술자격 또는 학·경력사항 기재

[별지 제27호서식] 품질시험․검사성과 총괄표 공사명 : ○○ 공사(공사기간 . . ～ . . 공정 : %)
공 종	시험․검사종류 (재 료)	시험․검사회수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험
작성일시 : 년 월 일 작 성 자 : 소속 : 직위 : 성 명 : (인 또는 서명)

[별지 제28호서식]

시험․검사 실적 보고서

공 종	시험․검사 종 목	계획시험 ․ 검사회수	전월까지 시험․검사회수				금월 시험․검사회수				누계 시험․검사회수
			실 시	합 격	불합격	재시험	실 시	합 격	불합격	재시험	실 시	합 격	불합격	재시험

[별지 제29호서식] 검 측 대 장 공사명 : ○○공사 검측감리원 : (인)
공 종	검 측 부 위 (설계규격, 단위, 수량 포함)	검측일	검 측 내 용	합격 여부	검측결과 또는 입증자료
주) 매몰부분은 사진 첨부

[별지 제30호서식] 발생품(잉여자재) 정리부 공사명 : 착공일 : . . 품 명 : 규 격 : 준공일 : . .
발생년월일	품 명	규 격	단위	수 량		발생사유	보관사항 (발주청인계여부)
				사용가능	사용불가

[별지 제31호서식] 안전보건 관리체제
구 분							선임(전담)자							자 격 유 무						자 격 내 용
안전보건총괄책임자
안 전 관 리 자
보 건 관 리 자
안 전 담 당 자
안 전 보 건 위원회																				고용노동부에서 각 시공회사로 기시달, 구성 및 운영여부
[별지 제32호서식] 재 해 발 생 현 황 집 계 표
구 분	재해자 수		사 망			부 상															직업병	재해율
						4-7일			8-29일				1-3월미만					3월이상
분기별
( ) 월
( ) 월
현 황 도
구분	계	추락			전도	충 돌				낙하 비례		붕괴 도괴				협작			감 전		폭발 화재	파열	기타
분기별
( ) 월
( ) 월

[별지 제33호서식] 안전교육 실적표
구 분	실시회수	주요내용	교 육 인 원		비 고
			직 원	기 능 직
정기교육
특별교육
계

[별지 제34호서식]

협의내용 등의 관리대장

1. 사업개요

사 업 명		사 업 자
사업승인기관		사 업 승 인 일
환경영향평가 협 의 기 관		환경영향평가 협 의 일
사 업 착 공 (예 정) 일		사 업 준 공 (예 정) 일
협 의 내 용 관 리 책 임 자		성 명
사 업 규 모
사 업 내 용

2. 협의내용 이행계획

구 분	협 의 내 용	이 행 계 획
		이 행 방 법	이 행 주 체	이 행 시 기

3. 협의내용 이행현황

연월일	공정률(%)	협 의 내 용	이행내역	미이행사항 및 사후대책

[별지 제35호서식] 사후환경영향조사 결과보고서 1. 사 업 명 : 2. 조 사 기 간 : 3. 관리 책임자 : 4. 환경영향 조사결과 :
조사일시	구 분		조사항목	조사지점		조사결과		문 제 점	조치결과		비 고
5. 승인기관 조사 ‧ 확인결과
조사일시		승인기관 및 담당자			협의내용 및 이행사항		미이행사항 및 사후대책			비 고
주) ① 서식은 B4(8절,횡) 규격의 용지로 작성 ② 협의내용 이행현황은 사업공정을 파악할 수 있는 사진첨부.

[별지 제36호서식]

공사 기성부분 검사원

공사감독관 경유       (인)

1. 공  사   명  :

2. 위       치  :

3. 계 약 금 액  :

4. 계약 년월일  :

5. 착공 년월일  :

6. 준 공 기 한  :

7. 현 재 공 정  : 20    .    .    현재    %

8. 첨 부 서 류  : 기성공정 내역서, 기성부분 사진

위 공사의 수급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20     년     월    일

주   소  :

상   호  :

성   명  :

귀   하

[별지 제37호서식]

기성부분

감 리 원(         )감리검토조서

준    공

공   사   명  :

20    년     월     일      와 계약분

위 공사의 감리원으로 임명받아  20   년  월  일부터  20   년  월  일까지 실지 현장 감리한 결과 (제     회 기성부분 검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설                                                            %가기성

계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 (            ) 되었

준    공

음을 인정함.

검측감리원                    (인)

귀  하

[별지 제38호서식] 공사기성부분 내역서 1. 도 급 액 : 2. 공 사 명 : 3. 기성부분금액 : 20 년 월 일 현재 4. 내 역 : (갑)
공사 내역	규 격	도 급 액			금회 기성액			전회까지의 기성액			적 용
		수량	단가	금액	수량	금액	비율(%)	수량	금액	비율(%)
(을)
공사 내역	규 격	도 급 액			금회 기성액			전회까지의 기성액			적 용
		수량	단가	금액	수량	금액	비율(%)	수량	금액	비율(%)

[별지 제39호서식]

공사기성부분 검사조서

공  사  명  :

20   년   월   일      준공

20   년   월   일           와 계약분

위 공사 제   회 기성부분검사의 명을 받아 20   년   월   일  검사한 결과 별지 내역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을     %로 조정함.

단, 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리검토조서에  의거함.

20    년    월    일

기성부분 검사자：           (인)

입     회     자：           (인)

귀   하

[별지 제40호서식]

준  공  검  사  원

공사감독관 경유          (인)

1. 공  사   명  :

2. 공 사 위 치  :

3. 계 약 금 액  :

4. 계약 년월일  :

5. 착공 년월일  :

6. 준 공 기 한  :

7. 실지준공년월일  :

8. 첨 부 서 류  : 준공사진

위 공사의 수급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김 없이 준공하였음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20     년     월    일

주  소  :

상  호  :

성  명  :

귀   하

[별지 제41호서식]

준 공 검 사 조 서

공  사  명  :

20    년   월   일      준공

20    년   월   일         와 계약분

위 공사 준공검사의 명을 받아 20    년   월   일 검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 어김 없이 준공하였음을 인정함.

단, 수중지하 및 구조물 내부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리검토조서에 의함.

준 공 검 사 자

입    회    자

귀    하